	1978. 4. 1. 제정 2005. 10. 1. 개정 (제8차 개정)

1. 설계상의 일반원칙

12030 탐탄시추공사 설계기준

-  -

-  -

12030 탐탄시추공사 설계기준

12030  탐탄시추공사 설계기준

가. 시공방법 : 직영과 사외도급으로 병행함.

나. 공사비의 누진제

(1) 누진율의 적용비목 : 인건비, 유류비, 전력비(전동기 사용시) 및 기계손료(단, 빗트비, 바렐비, 화공약품비는 제외)

(2) 누진율 적용방법

(가) 일반공법

심도구간		단가 부호	단 가 산출공식	적 용 율
초과	이하
0m	300m	A	A×1.00	(1)원단위 이하는 절사
300m	400m	B	A×1.15
400m	500m	C	B×1.15

(나) 와이어라인 공법

심 도 구 간		단가부호	계산공식	비 고
초과	이하
0m	500m	A	A×1	500m부터 매 300m마다 25% 가산
500m	800m		A×1.25
800m	1,100m		A×1.50
1,100m	1,400m		A×1.75

다. 장비사용 기준

(1) 일반공법, 와이어라인공법 사용기준 동일함

심도	갱내선 진시추		300m 이하공		300m초과 700m이하			700m초과 1,000m이하			1,000m초과 1,300m이하			1,300m초과 1,600m이하
규격	B	A	N	B	H	N	B	H	N	B	H	N	B	H	N	B
%	50	50	50	50	10	40	50	10	50	40	20	50	30	30	50	20

(2) 지질조건(붕괴가 심한 지층)에 따라 광업소 기획부장(지질과장)의 승인을 득하여 A규격을 사용할 수 있다. <2005. 10. 1. 개정>

(3) 갱내 선진시추는 A-E규격을 사용할 수 있다.

2. 1일 굴진량 기준

가. 일반공법

암종 구분	연 암		중 경 암		경 암		초경암(붕괴층)
	갱 외	갱 내	갱 외	갱 내	갱 외	갱 내	갱 외	갱 내
수 직	11.1	8.3	9.1	6.8	7.5	5.6	6.0	4.5
각 도	9.4	7.1	7.7	5.8	6.4	4.8	5.1	83.8

* 각도는 수직의 15% 감함

* 갱내는 갱외의 25% 감함

나. 와이어라인 공법

암종 구분	연암		중경암		경암		초경암(붕괴층)
	갱외	갱내	갱외	갱내	갱외	갱내	갱외	갱내
수 직	15.0	11.3	13.5	10.1	11.5	8.6	9.0	6.8
각 도	12.8	9.6	11.5	8.6	9.8	7.3	7.7	5.8
수 평	11.3	8.4	10.1	7.6	8.6	6.5	6.8	5.1

* 각도는 수직의 15% 감함

* 수평은 수직의 25% 감함

* 갱내는 갱외의 25% 감함

다. 붕괴층은 초경암에 준한다.

라. 각도 시추는 80도 미만공에 한한다.

마. 1일 굴진량은 24시간/일, 25일/월 가동을 기준한다.

바. 각 광업소 지질조건 및 암종은 다음표를 기준한다.

(1) 각 소별 암종 구분표

구 분	암 종
연 암	∘제3기의 이암, 사암 및 세일 ∘석회암, 제3기의 응회암 ∘괴탄
중경암	∘중생대, 고생대의 세일 및 편암류 ∘중생대, 고생대의 응회암
경 암	∘중생대, 고생대의 사암 및 사질셰일 ∘제3기의 역암
초경암	∘중생대, 고생대의 규암 ∘역암 및 규질암류
기 타	∘석영질 및 변질작용을 받은 암석은 암종구분에서 차상위 암종을 적용함 ∘암종구분에서 제외된 암종은 이와 유사한 암종을 적용함.

(2) 암종비율에 따른 설계암종 구분표

유형	암 종 비 율 예	설계암종
A B C D E F G H I J	경암51% 중경암49% 경암50% 중경암50% 경암50% 중경암, 연암 50% 초경암50% 경암, 연암50% 경암51% 중경암, 연암49% 경암70% 중경암, 연암30% 경암25% 중경암50% 연암25% 초경암30% 경암20% 중경암30% 연암20% 초경암40% 경암10% 연암50% 초경암10% 경암30% 중경암10% 연암50%	경 암 중경암 중경암 경 암 중경암 경 암 중경암 경 암 경 암 중경암

3. 구성 인원 및 노임

가. 직영

(1) 시추기 1대에 “갑”, “을”, “병”의 3개반으로 하고 각반은 일반직직원을 계장으로 하여 계장 3명, 시추공은 시추총작업 심도에 따라 구성한다.

(2) 선진시추 : 시추기 1대에 “갑”, “을”, “병”의 3개반으로 편성 각반 2명씩(자재담당 1명) 7명으로 구성한다(단, 100M이하 시추에 한함).

구 분 직 종 별	인 원
	500m이하	500m이상
기술관리직 시추공	3 6	3 6
계	9	9

나. 사외도급

(1) 심도별 소요인원

구 분 직 종 별	인 원
	300m이하	300m초과 500m이하	500m초과
조장 운전공 시추공 보조공	1 3 2 1	1 3 3	1 3 5 1
계	7	7	10

(2) 노임은 정부노임단가를 적용한다.

(정부노임 단가표에서 조장 및 운전공은 보링공, 시추공은 특수인부, 보조공은 보통인부를 적용함)

(3) 근로기준법 제55조에 의하여 야간근로수당을 계상한다.

(예 : 기본급 50/100×8/24 적용)

다. 설치 및 철수

(1) 설치 및 철수일수

심 도	300m이하	300m초과 500m이하	500m초과 1,000m이하	1,000m초과 1,300m이하	1,300m초과
총일수	3	5	7	9	20
설 치	2	3	4	5	15
철 수	1	2	3	4	5

다만, 직영에 한하여 철탑 20m이상 사용시 심도 1,000m이상은 설치 20일, 철수 8일을 계상한다.

* 갱내선진 시추 : 성치 2일, 철수 2일을 계상한다.

(2) 보공관(케이싱) 인양

(가) 일 수

심도	300m 이하	300m초과 500m이하	500m초과 700m이하	700m초과 1,000m이하	1,000m초과 1,500m이하	1,500m 초 과
일수	2	4	6	8	10	12

(나) 인원 : 전항3 구성인원 및 노임 가항, 나항 (1)의 인원구성에 준한다.

4. 재 료 비

가. 유 류

(1) 시추기 및 펌프 심도별 마력수 기준

(가) 직영 : 당사 보유 시추기 및 펌프의 엔진 실마력을 기준하되 부하율은 70%를 적용한다.

(나) 사외도급

구분	내 역	200m 이하	200초과 300이하	300초과 500이하	500초과 600이하	600초과 700이하	700초과 1,000이하	1,000초과 1,500이하	1,500초과 2,000이하
시추기	마 력 수 부하율 (%) 실 마 력 수	10 70 7	15 70 10.5	25 70 17.5	25 70 17.5	31 70 21.7	37 70 25.9	43 70 30.1	60 70 42
펌프	급수용마력수 양수용마력수 계	7 5 12	7 5 12	10 5 15	14 5 19	15 5 20	15 5 20	17 5 22	18 5 23
	부 하 율 실 마 력 수	70 8.4	70 8.4	70 10.5	70 13.3	70 14	70 14	70 15.4	70 16.1
합 계		15.4	18.9	28	30.8	35.7	39.9	45.5	58.1

(2) 유류 소모량

품 명	기 준	단위	소 모 량	대 상
경 유	시간당 마력당	ℓ	0.227	디젤기관
엔 진 유	〃		동력유량의 5%
기 타 유	〃		동력(가격)의 5%

(가) 가동율 : 55%

(나) 가동시간 : 갱외 13.2시간,  갱내  9.9시간

나. 빗트류 및 바렐류 개당 굴진량

(1) 빗트류

암종	품 종	규격	굴진 M/개	단위	금 강 석
					개 당 매입량	회 수		순소모
						가용고석	폐석
연암	써훼이스쎗트 코아빗트 (일반공법)	H N B A E	32 25 33 21 15	cts 〃 〃 〃 〃	35 18 15 10 7	17.5 9 7.5 5 3.5	8.75 4.50 3.75 2.50 1.40	8.75 4.50 3.75 2.50 1.10
	써훼이스쎗트 코아빗트 (일반공법)	HQ NQ BQ AQ	32 40 31 22	〃 〃 〃 〃	40 30 20 15	20 15 10 7.5	10.00 7.50 5.00 3.75	10.00 7.50 5.00 3.75
중경암	써훼이스쎗트 코아빗트 (일반공법)	H N B A E	32 23 29 19 13	〃 〃 〃 〃 〃	35 18 15 10 7	17.5 9 7.5 5 3.5	8.75 4.50 3.75 2.50 1.40	8.75 4.50 3.75 2.50 2.10
	임프레그네이트 코아비트 (와이어라인 공법)	HQ NQ BQ AQ	32 40 31 22	〃 〃 〃 〃	분말 47.3 25.8 14.7 12.0	볼츠 3.5 3.2 2.9 2.6
경암	임프레그네이트 코아빗트 (일반공법)	N B A	31 30 26	〃 〃 〃	분말 17.4 11.6 9.5	볼츠 3.2 2.9 2.5
	임프레그네이트 코아비트 (와이어라인 공법)	HQ NQ BQ AQ	28 35 27 19	cts 〃 〃 〃	47.3 25.8 14.7 12.0	3.5 3.2 2.9 2.6
초 경 암 (붕 괴 층)	임프레그네이트 코아비트 (일반 공법)	N B A	29 28 24	〃 〃 〃	22 14.3 11	3.2 2.9 2.5
	임프레그네이트 코아비트 (와이어라인 공법)	HQ NQ BQ AQ	25 32 24 17	〃 〃 〃 〃	63.8 28.6 17.6 14.4	3.5 3.2 2.9 2.6
공통	리 밍 셀	H N B A E	65 65 65 65 65	〃 〃 〃 〃 〃	10 8 6.5 5.5 4	5 4 3.25 2.75 2	2.5 2 1,622 1,375 1	2.5 2 1,622 1,375 1
	케이싱빗트	H N B A	32 32 32 32	〃 〃 〃 〃	24 20 16 12	12 10 8 6	6 5 4 3	6 5 4 3
	케이싱 슈	H N B A	32 32 32 32	〃 〃 〃 〃	20 16 14 11	10 8 7 5.5	5 4 3.5 2.75	5 4 3.5 2.75
* 케이싱 빗트 및 케이싱 슈는 굴진량의 1/20계상

(2) 코아바렐류

품명 규격		개 당 굴 진 량 (M)
		코아바렐류및아후타튜브	코아리프타	리프타케스	익스텐숀	스라스트 B/R	오바숏
일반공법	H	230M	40M	80M	150M	30M
	N	230	40	80	150	30
	B	230	40	80	150	30
	A	230	40	80	150	30
	E	230	40	80	150	30
W/L 공 법	HQ	600	40	80	-	30	2,000M
	NQ	600	40	80	-	30	2,000
	BQ	600	40	80	-	30	2,000
	AQ	600	40	80	-	30	2,000

다. 화공약품류

(1) 화공약품 및 시멘트 소모량

품 명	기 준	단위	소모량	비 고
화공약품	M당 300M이하	ℓ/M	65.8
	M당 300M초과 700M이하	〃	70.7
	M당 700M초과 1,000M이하	〃	73.7
	M당 1,000M초과 1,300M이하	〃	81.7
	M당 1,300M초과 1,600M이하	〃	89.6
	M당 1,600M초과 1,900M이하	〃	97.6
시 멘 트	M당 500M이하	kg	2.1	누수방지
	M당 500M초과	〃	2.6

* 단, 시멘트 소모량은 직영에 한함.

(2) 화공약품 혼합비율(청수 1,000ℓ)

품명	벤트나이트	시․엠․씨	씨크레이	리보나이트	아스텍스	머드오일	경유	기 타
비율 (%)	7	0.2	0.8	2.5	0.5	0.5	1	재료비의 10%
수량 (㎏)	70	2	8	25	5	5	10

라. 보공관(케이싱파이프) 인양가동시간 및 부하율

가 동 시 간	부 하 율	대 상
8시간/일	50%	시 추 기 계

* 케이싱파이프 인양시 펌프 동력비는 계상치 않음

마. 기타 자재비

(1) 적용비목 : 유류, 전기료(전동기 사용시)

빗트류, 코아바렐 및 화공약품비

(2) 적용비율 : 10%(단, 직영공사에 한하여 적용함)

5. 운 반 비

가. 철도운임 : 철도청 기준 적용함.

나. 자동차운임(화물자동차)

(1) 관허(교통부) 요금을 적용함(대한통운요금)

(2) 중량 용적 및 험로의 할증을 적용할 수 없음.

다. 인력운반 : 정부표준 품셈의 인력운반 적용함.

라. 심도별 소요 기재 중량

심도별	300m 이 하	300m~ 500m이하	500m~ 700m이하	700m~ 1,000m이하	1,000m~ 1,300이하	1,300m~ 1,600m이하	1,600m 초 과
중량 (ton)	11	19	25	36	51	72	93

* 직영 시추는 보유 기재의 실증량을 적용함.

6. 기계손료

가. 제  원

(1) 내용년수 : 6년

(2) 년간굴진량 : 년간 270일 가동으로 일반공법과 W/L공법으로 구분 일굴진량을 적용 산정함.

(3) 심도별 장비가격 : 매년도 가격현실화 조정된 정부기관 또는 국영기업체의 가격에 준함.

나. 기장비 손료공식

기장비가격×2.125

내용년수×년간굴진량(M)

* 본 공식에 의한 기계손료는 사외도급 공사에 한함.

다. 수리비(직영에 한함)

(1) 당공사 장비 정비규정 제14조의 4단 재생정비(당공사 정비공장 수리 불가)는 개발비 소별 경비(수리비)에 반영 별도 정비함.

(2) 수리비 산출공식

기장비가격×0.7

내용년수×년간굴진량(M)

7. 암추(코아)상자 제작

가. 암추상자 규격

(1) 일반공법

규격	길이(장)	넓이(폭)	암추 총길이
N	1,530m/m	353m/m	7.5m
B	1,530	343	9.0
A	1,530	343	12.0

(2) 와이어라인 공법

규 격	길이(장)	넓이(폭)	암추 총길이
HQ	1,530m/m	390m/m	6.0m
NQ	1,530	318	7.5
BQ	1,530	315	9.0
AQ	1,530	324	12.0

나. 암추상자 제작용 재료

∘규격별 상자당 소요자재

구 분	품명	단위	H	N	B	A	비 고
일반공법	목재	재	5.9	5.8	5.6	5.7	제재손실 10%까지 가산할 수 있다.
W/L공법	〃	〃	5.9	5.6	5.4	5.5
공 통	못	kg	0.33	0.38	0.44	0.56

다. 상자제작 노무비

목공일/일×(총 암추상자 수량÷6상자/일)

8. 기타경비․일반경비․이윤

가. 적용대상비목 및 적용율

(1) 일반관리비 : 노무비, 자재비, 경비의 6.0% 초과 계상할 수 없음

(2) 이      윤 : 노무비, 경비, 일반관리비의 15%를 초과 계상할 수 없음.

(3) 경     비 : (기계장비, 운반비, 보험료, 통신료, 여비, 교통비, 복리후생비, 소모품비 등)중

(가) 보험표 : 노임의 48/1,000

(나) 통신 및 후생비(기타비) : 통신료, 여비, 교통비, 후생비, 소모품비의 총괄이며 실적에 의거 적용

9. 간접재료비 : 직접재료비의 5%까지 계상할 수 있다.

10. 시공기간

가. 직영

작업일수 : 기장비정비일수 + 운반일수 + 설치일수 + 굴진일수 + 보공관(케이싱 파이프)삽입일수+지온공곡조사일수+시멘트주입일수=A

작업일수 : 광업소 공휴일=B

시공기간 : A+B

나. 사외도급

작업일수 : 설치일수 + 굴진일수 = A

휴업일수 : 작업일수×2/5=B

시공기간 : A+B

11. 기 타

가. 확공

(1) 확공 굴진능률은 정상 굴진능률의 90% 가산함.

(2) 확공 공사비는 확공이 있을 경우에 한함

나. 공내지온 조사가 필요시에는 1일을 계상할 수 있다.

다. 시추공내 공곡조사는 매400m마다 1일씩 계상함(직영에 한함).

라. 시멘트 주입일수는 700m이하공은 1일, 700m초과공은 2일로 계상한다.

다만, 일수계상은 직영에 한함.

마. 가건물(목조)

(1) 장기간을 요하게 되는 시추공사의 경우에는 우기 또는 동기의 풍우, 강설과 추위, 동파, 직사광선 등을 피하고

(2) 중요 기자재 또는 자재의 도난, 손망실 방지 등의 필요가 있을 경우에 한하여 가건물 설치를 계상할 수 있음.

(3) 가건물(목조) 설치비는 직영에 한함.

바. 합숙비 및 교통비

(1) 합숙비 : 작업장이 산간벽지에 위치하여 방별 출퇴근이 어려워 합숙을 하여야 할 경우에는 합숙에 소요되는 실비를 지급할 수 있다.

(2) 교통비 : 시추작업이 당사 출퇴근 버스를 이용할 수 없고, 일반버스를 이용하여야만 출퇴근 할 수 있을 때에는 왕복 교통비를 지급할 수 있다.

부      칙

제1조(시행일) 이 예규는 1978년 4월 1일부터 제정 시행한다.

제2조(개  정) 이 예규는 1980년 1월 1일부터 개정 시행한다.

제3조(개  정) 이 예규는 1985년 3월 20일부터 개정 시행한다.

제4조(개  정) 이 예규는 1987년 5월 15일부터 개정 시행한다.

제5조(개  정) 이 예규는 1988년 3월 24일부터 개정 시행한다.

제6조(개  정) 이 예규는 1989년 6월 1일부터 개정 시행한다.

제7조(개  정) 이 예규는 1990년 3월 20일부터 개정 시행한다.

제8조(개  정) 이 예규는 1993년 6월 1일부터 개정 시행한다.

제9조(개  정) 이 예규는 2005년 10월 1일부터 개정 시행한다.