갱도규격 및 운용요령

2010.  6.  1.

대한석탄공사

목   차

Ⅰ. 굴진	5

1. 목적 및 적용 범위	5

가. 목적	5

나. 적용범위	5

2. 갱도굴진 비목별 정의	5

가. 비용별 정의	5

나. 비용별 갱도구분	5

3. 갱도규격 및 규격별 품셈표	6

가. 갱도구분	6

나. 갱도규격	6

다. 규격별 품셈표	6

4. 갱도규격 품셈표 활용방법	6

가. 작업조건별 갱도구분 요령	6

나. 암질구분 및 지주간격 적용 요령	7

다. 절확작업 설계요령	7

라. 굴방작업 설계요령	8

마. 예외 여건에 대한 집행 요령	8

바. 승거리 보정	9

사. 기타사항	9

5. 갱도공사 설계요령	10

가. 계획수립	10

나. 갱도공사 예산신청 요령	10

6. 갱도공사 집행 및 검수요령	12

가. 갱도공사 착공	12

나. 갱도공사 검수	13

다. 갱도공사 설계 변경	14

7. 갱도공사 관계서류 (착공, 검수, 기성고, 준공) 및 작업요령	15

가. 갱도공사 관계서류 서식	15

나. 갱도공사 관계서류 작성요령	15

다. 기타	15

8. 갱도공사 준공처리 요령	16

[별첨1]

가. 굴진갱도 규격	19

① 목쉬	23

② 철쉬	33

[별첨2]

나. 갱도규격별 품셈표	53

① 수평	55

② 중단	77

③ 사갱	85

④ 승	99

[별첨3]

다. 갱도공사 각종 보고 양식	107

Ⅱ. 채탄, 보갱	131

Ⅰ. 굴    진

1. 목적 및 적용범위

가. 목적

암석갱도의 사용 목적에 따라 갱도규격을 표준화 시키고 규격별, 암종별

및 여건별로 구분하여 표준품셈표를 책정, 시행하므로서,

1) 설계상의 노력을 감소시키어 업무능율을 향상시키고,

2) 적정 작업인원 및 자재의 통제를 가능하게 하며,

3) 각종 굴진공사의 계획수립에서 준공까지의 절차와 업무처리 기준을 정하는데 그 목적이 있다.

나. 적용 범위

각종 굴진 갱도공사 계획에 적용함을 원칙으로 한다.

2. 갱도굴진 비목별 정의

가. 비목별 정의

1) 시설비 굴진 : 굴진 공사 중 석탄개발에 근간을 이루는 골격갱도로서 10년 이상 유지할 필요가 있는 갱도의 굴진을 시설비 굴진이라 한다.

즉, 기계장치를 위한 갱도, 주통기용 갱도, 주배수용 갱도, 운반만을 목적으로 한 갱도 등의 굴진공사

2) 개발비 굴진 : 탄층 발달상태등이 명확히 확인되지 않은 구역의 탄층   상태 확인 및 지질구조 확인을 위한 갱도굴진

3) 생산비 굴진 : 국부적인 운반이나 채탄작업을 위한 갱도굴진

나. 비목별 갱도구분

1) 시설비 갱도 : 수갱 및 수갱 부대시설 갱도, 충전실, 수갱 메인크로스, 50HP이상 펌프실, 500㎥이상 수류지, 75HP 이상 권양기실 및 부수갱도, 사갱 및 부대갱, 권립, 적출갱, 주운반갱 (하반갱, 중반갱이 구분되지 않고 병용 사용한 갱도는 시설비 에서 제외), 홉바, 콘베아사갱, 주요통도, 배수갱, 주선풍기실 등

2) 개발비 갱도 : 채탄을 위한 갱도

3) 생산비 갱도 : 시설비나 개발비 갱도가 아닌 갱도로, 중반갱, 크로스, 중단승, 중단, 임시 (권양기실, 펌프실, 충전실, 배수갱, 풍도) 갱도 및 기타갱도

3. 갱도규격 및 규격별 품셈표

가. 갱도 구분

1) 갱도종별 : 수평, 중단, 사갱, 승

2) 작업조건별 : 특수, 일반

3) 지주종별 : 철화, 목화

4) 암 종 별 : 경질(A), 보통(B), 연질(C)

나. 갱도규격 (별첨1, 참조)

1) 목쉬  2)철쉬

다. 규격별 품셈표 (별첨2, 참조)

1)수평   2) 중단   3)사갱    4) 암석승

4. 갱도규격 품셈표 활용방법

가. 작업조건별 갱도구분 요령

1) 특수조건 갱도

가) 심도 400m 이상 개소 : 갱구수준에서 굴진작업시 광차에 경석을 적재하는 운반갱도의 권립수준까지 수직고가 400m 이상인 개소

나) 하부 채굴적에 의한 균열 등으로 하중발생 또는 발파효율이 현격히 저하되는 갱도 (굴진작업 개소의 직하부편 생산후 상당기간 경과하여 암석에 균열발생 갱도로서 지질과장, 생산부장이 확인한 갱도에 한함) 단, 사외도급 굴진은 제외

2) 일반조건 갱도 : 특수조건 갱도를 제외한 갱도

나. 암질구분 및 지주간격 적용요령

1) 암질구분

암질은 경질암석, 보통암석 및 연질암석으로 구분하고, 암석에 따른 단가의 선택 요령은 다음과 같다.

가) 경질암석 : A로 표시하고 무지주 상태에서 작업하여도 낙반등 보안상 위험이 없고 굴진 후 입쉬를 하지 않아도 갱도가 붕락되지 않는 갱도에 활용한다. 활용 암석은 경질사암, 화성암, 경질석회암, 석영반암, 맥암, 역암, 응회암 등

나) 보통암석 : B로 표시하고 심한 중압은 걸리지 않지만 부석, 낙반 등의 보안상 위험으로 입쉬를 해야 하는 갱도로서 활용암석은 사암, 경질쎄일, 사질쎄일, 석영조판암 등

다) 연질암석 : C로 표시하고 몹시 무른 암종으로 입쉬 후에 곧 중압이 걸리는 갱도로서 활용암석은 연질쎄일, 탄질쎄일, 석탄층 등

2) 암질에 따른 지주간격 활용

가) 경질암석 : 지주입쉬를 하지 않음을 원칙으로 한다.

나) 보통암석 : 약간의 중압이 걸리므로 쉬간은 0.75m를 표준으로 한다.

다) 연질암석 : 심한 중압으로 쉬간은 0.45m를 표준으로 한다.

다. 절확작업 설계요령

1) 대규격 갱도 굴착시

<설계 요령>

ο 1차 : 소규격 갱도 굴진작업으로 설계

ο 2차 : 절확작업 설계 (소구격 갱도 → 최종규격 갱도로)

ο 설계품셈 = 1차 소요품셈 + 2차 소요품셈

<절확작업 품셈>

ο 굴착 : (절확량/2.8×2.1 규격 m당 단면적) × (2.8×2.1 품셈 공수)

※ 절확량=최종갱도 단면적 - 소규격갱도 단면적

ο 지주 : (최종규격 단면적/소규격갱도 단면적) × 소규격갱도 지주부공수+소규격갱도 지주실공수의 50%

ο 배수로 : 시공 필요시 일반갱도 품셈활용

2) 10m 이상 연장갱도를 대규격으로 확장시는 m당 일위대가로 산정

<설계 요령>

ο m당 일위대가로 산정

<절확작업 품셈>

ο 굴  착 : 최종규격공수 - 당초규격공수 = 설계공수

ο 지  주 : 당초 규격 지주부공수의 50% + 최종규격 지주부 공수

ο 배수로 : 시공 필요시 일반갱도 품셈 활용

3) 10m 이하 소구간을 대규격으로 부분 확장시

ο 굴  착 : 전체 절확량을 2.8×2.1 규격 기준

(목쉬 경우는 7 × 8 기준) 굴진 m로 환산한 품셈

ο 지  주 : 필요시 상기 1), 2)항의 해당요건에 따라 설계

ο 배수로 : 지주와 동일

라. 굴방작업 설계요령

소구간 절확작업 <절확 3)항> 산출 방식으로 설계하되 사갱 2.8×2.1 규격 으로 품셈 활용

단, 대규격 굴방 작업으로 별도 권양기 등을 설치하였을 때는 그에 상응하는 경운반부 공수를 가산하여 줄 수 있다.

마. 예외여건에 대한 집행요령

1) 갱도 규격외의 특수규격이 필요한 경우는 필요성에 대한 충분한 사유와 자료를 첨부하여 본사에 신고하되, 특수규격에 대한 검토에 시간을 요한다고 인정될 경우는 단가표, 작성시간, 신청서 및 승인서의 서류, 왕복시간 등을 감안하여 예산신청 30일 전에 미리 신청하여 승인을 받은 후 정규적인 일할 예산 신청시 반영토록 한다.

가) 특수 시설물, 시설물 설치용의 갱도

각종 규격의 권양기실 (Hoist room), 충전실(Charging room). 동력실(Power room), 집진기실(Dust collector room) 등의 갱도

나) 특수기기 운반 겸용갱도

권양기실에 권양기를 운반할 목적의 연결갱(Access tunnel)등의 갱도

다) 특수 용도의 갱도

운반용 갱도 외에 특별히 통기 겸용으로 소정의 규격이 필요할 시 및 특수한 목적을 가진 갱도

2) 예외조건의 사용요령

주요작업장에서 멀리 떨어진 별개의 독립 작업장에서 갱도공사를 하여야 할 경우 및 생산 작업에 지장을 주지 않기 위한 별도의 장비를 설치하여 작업을 할 경우 등의 이유로 책정된 품셈표 이외의 고정부인원, 자재비 또는 기타 특수조건에 추가될 사항이 있을 경우는 다음과 같이 처리한다.

가) 고정부를 배치해야 할 경우는 현재 정하여진 고정부 법위 내에서 배치하여 별도로 충원하지 않도록 할 것이나 부득이 배치시켜야 할 경우

나) 시설비 굴진만하는 갱이나 사외도급 시행 등으로 부득이 품셈표 이외의 자재가 필요하여 추가설계를 할 경우

다) 작업여건의 변화로 불가피하게 수적, 수압을 하게 될 경우

ㅇ 수적시 - 경취부 공수의 100% 가산 (6 × 6, 6 × 7 규격과 중반갱도를 제외한 수평갱도에 적용)

ㅇ 수압시 - 수압거리 100m 초과시, 매초과 200m 당 경운반공수의 50% 가산(예, 300m에 50%, 500m 에 100% - 가산)

상기 가) ~ 다)항의 경우는 갱도공사 투자사업 예산 신청시 건명별로 사유와 산출근거를 기타란에 기재 또는 첨부하여 승인을 득하여야 하고 갱도공사 착공보고 시에도 기타란에 사유와 산출근거를 첨부하여야 한다.

바. 승거리 보정

승구에서부터 사거리 65m 이상 승갱도 및 중단굴진 경우는 해당 규격 일위대가에 50%를 가산하여 준다. (단, 외주굴진의 경우 1/2적용) (’07.1.1 개정 생산팀-175)

사. 기타 사항

1) 갱도규격 및 운용요령이 개정 발효되는 때부터 설계 및 시공을 착수하는 모든 굴진갱도는 이 표에 명시된 규격에 준하여 굴진 하여야 하며, 이에 따른 품셈을 활용함을 원칙으로 한다.

2) 현재 책정한 규격표와 맞지 않은 개소에서 굴진할 때는 본 갱도규격중 유사(적은) 규격의 품셈표를 택하여 굴착단면적 비례로 산출한 품셈표에 의거 설계 및 시공한다.

5. 갱도공사 설계 요령

가. 계획 수립

1) 암질별 구분요령

광업소장은 굴진개소에 대한 계획 수립시 지질과장으로 하여금 계획갱도의 암질구분을 상부 및 인접갱도의 지질 변동 상태를 대비하여 분석한 후, 암질별 굴진수량을 확인하여 정확한 계획을 수립한다.

예) 총150m 굴진갱도 계획 중 경질암 A 50m, 보통암 B 80m, 연질암C 20m 로 구분

2) 굴진방향 설정요령

시설비 굴진 방향은 장기개발계획에 따른 갱도개발 기본골격에 따라 설정하고, 생산비 굴진 방향은 아래 요령에 의하여 결정한다.

가) 모든 갱도의 굴진 방향은 지질과장이 생산부장의 합의하에 결정한다.

나) 굴진방향은 계획 도면에 방위 각도를 갱도 분기점에 정확히 표시한다.

다) 기획부장은 분기별, 월별 굴진 계획도를 작성 생산부장 합의 후 소장까지 결재를 득한 후, 1부는 생산부에 1부는 본사에 제출한다. (본사 제출도에는 채탄 현황이 포함된 것으로 축척 1/2000도면)

나. 갱도공사 예산신청 요령

1) 기획부장(지질과장)은 장기개발계획에 의거 갱도골격, 기본설계의 방향, 규격이 적정한가를 면밀히 검토하여 투자사업 관리지침(예규)에 의거 예산 신청시 완전 설계에 의해 정확한 공정, 위치, 규격, 작업량, 금액 등을 산출 신청하여 설계변경 되는 일이 없도록 한다.

2) 예산 신청시 건명별로 다음 양식 각 1부씩을 첨부 발신문서로 일괄 신청 한다.

가) 갱도공사 예산 총괄표 : 석공서식 갱도공사 1호

나) 갱도공사 예산내역 일람표 : 석공서식 갱도공사 2호

다) 갱도공사 예산내역서 : 석공서식 갱도공사 3호

라) 갱도공사 시방서 : 석공서식 갱도공사 4호

마) 갱도공사 공정표 : 석공서식 갱도공사 5호

바) 갱도공사 시행계획도 (예상암종 표시된 세부계획 도면으로 결재를 득한 것)

사) 기타

※보고서식 (별첨 3참조)

3) 갱도공사 계획서 및 기재요령

가) 갱도공사 예산총괄표 - 석공서식 갱도공사 1호

ο 인건비, 자재비, 예비비 합계 : 암질별 A, B, C 계의 금액

ο 정용부 노임 : 직영 인원에 대한 노임

ο 적요 : 기타 필요한 사항

나) 갱도공사 예산내역 일람표 - 석공서식 갱도공사 2호

ο 종별 : 공사내의 세분할 수 있는 공사 종류별

다) 갱도공사 예산내역서 - 석공서식 갱도공사 3호

ο A, B, C 암종에 따른 구분

ο 총계 : 공사 금액의 총금액으로 (A 암종 금액 × A작업량) + (B 암종 금액 × B작업량) + (C 암종 금액 × C작업량) 임

라) 갱도공사 시방서 - 석공서식 갱도공사 4호

ο 시방 : 갱도공사의 시방을 자세히 예거한다.

마) 갱도공사 공정표 - 석공서식 갱도공사 5호

ο 공사 건명 : 암종별 A, B, C 구분 및 작업공정란에 월, 일을 표시하고, 막대그래프 (Bar Chart) 로 공정을 나타낸다.

바) 갱도공사 시행 계획도 (예상암질 표시)

ο 갱도연장평면도 : 당해 공사분의 예상암질을 표시하고, 그 갱도 공사의 시공 동정계획이 갱도 옆에 표시 되어야 한다. 또한 그 갱도공사의 목적과 타시설과의 관계 등이 나타나도록 한다.

예) 중반갱 굴진공사 도면에는 암층등고선이 표시되어야 하고 주요 전차갱에는 전체 운반계통이 나타나서 당해 공사가 어느 부분에 위치하는지, 사갱 권립까지는 몇m 나 되는지 등이 표시되어야 한다.

ο 갱내 지질도 : 당해 갱도공사 전구간이 나타나는 갱내 지질도 및 갱외 혹은 상부 갱도의 지질도가 첨부되어 암종 구분의 정확성 여부를 판정 할 수 있도록 한다. 단, 갱내 지질도에 갱도연장 평면도를 삽입 표시할 수 있으면 갱도연장 평면도는 생략한다.

※ 갱내 지질도에 갱도연장  평면도를 표시하여 서류의 간소화를 기할 것.

ο 갱도규격(단면도) : 갱도 규격과 동일할시는 생략하나 이외의 특수규격을 굴착할시는 갱도 규격, 지주규격, 배수구 규격, 궤조의 위치, 압기관 및 배수관의 규격과 위치, 탄차, 기관차의 위치가 표시 되는 갱도규격 단면도를 첨부할 것이며 갱도 절확시도 절확 산출도 및 산출 근거를 상기도면에 삽입시킬 것. (설계도면 참조)

사) 기타

갱도공사 예산 내역서에 예외의 여건이 있어 추가할 필요가 있을 때에는 이의 사유를 본 작업 적요란에 상세히 기재하여, 본사에서 검토할시에 예외여건 인정여부를 정확히 판정할 수 있도록 한다. (4- 마항 예외조건에 대한 시행요령 참조) 또한, 갱도규격 번호아래 예외라고 추가하여 예외 여건의 공사임이 바로 나타나도록 한다.

6. 갱도공사 집행 및 검수요령

가. 갱도공사 착공

1) 투자사업계획서에 예산이 책정되면 갱도공사가 자동 승인됨으로 예산관리 세칙 14조 8항에 의거 예산 범위 내에서 갱도규격 품셈표에 의하여 자체설계 (당초 갱도공사 신청내역내에서) 하여 광업소장의 품의를 얻어 공사공정에 맞추어 착공한다. 공사가 착공되면 착공보고양식에 의거 지체 없이 보고한다. (사외도급 계약 시행시는 계약서 사본 1부 첨부)

2) 설계는 갱도규격 및 운용요령에 명시된 품셈표에 의하고, 예산서에 명시된 인건비, 자재비 금액을 초과 설계 할 수 없다.

3) 승인 건당 독립공사로 취급한다. (또한, 년도를 이월하여도 같다.)

4) 공사건명이 동일하고 동일 갱도의 계속공사로서 지속될 경우는 공사 건명 단위로 순차적으로 1-1, 1-2공사로 명시한다.

5) 측량과장은 작업시공 위치 및 방향을 굴진 계획도에 의거 작업막장 후편 5-10m 구간의 지주 천정(무지주구간은 천정암반)에 흰 Paint로 정확히 표시하고 갱도 중심에 못을 박고 실을 매어둔다.

6) 지질과장은 주 2회 이상 굴진 개소의 지질조사에 임하여 계획 이행상의 적부사항을 확인 점검한다.

나. 갱도공사 검수

모든 갱도공사 검수는 광업소 자체로 실시하고 그 결과만 본사에 보고한다. 단, 굴진검수 보고서 및 준공보고서를 받은 후 필요에 따라 본사에서 현지 출장 확인 할 수 있다.

※ 검사결과

ο 검수에 허위가 있을시 (작업 실적과 검수도가 상이한 경우 등)

ο 하기1) 항의 하자 규제 사항이 발견되었을 때

ο 검수자에게는 묵과되었으나, 인정될 수 없는 하자가 발견될시는, 금액으로 환산하여 관계자에게 직접 변상시킴과 동시에 엄중 문책한다.

1) 하자규제

가) 부당히 노임을 지급했을 때

나) 부당히 자재를  낭비했거나 유용했을 때

다) 특별한 사유 없이 공종을 계획대로 수행하지 않아서, 그 굴진개소에서의 생산계획량을 내지 못했을 때

라) 기술적인 측면에서 손실을 끼쳤을 때

ο 갱도규격이 이달되었을 때

ο 특별한 사유 없이 갱도방향 및 중심과 구배가 맞지 않아서 굴진 비용을 증가시켰을 때

ο 지주가 규격에 맞지 않거나, 지주를 부실하게 시공하여 곧 보수를 해야 하는 손실을 끼쳤을 때

ο 특별한 사유 없이 배수구를 파지 않았거나 규격이 미달되었을 때

2) 하자의 정의

가) 시설비, 개발비 갱도공사 : 갱도 사용목적에 따라서 공사시방서에 명기한 사항에 위배된 것을 말한다. 다만, 시방서에 명기되지 아니한 사항은 일반 원칙에 의한다.

나) 생산비 갱도공사 : 공사시방서가 있을시는 이에 준하고, 없을시는 소내 검수 규정에 따름을 원칙으로 한다. 다만, 특별히 필요하다고 인정될시는 소장 재량하에 별도 제정하여 시행할 수도 있다.

3) 갱도검수자 및 입회자

가) 시설비, 개발비 갱도 : 검수자는 측량과장이 되며 입회자는 시공 부서장(생산부장), 지질과장, 개발과장이 된다. (단, 상기 직책자가 없을 경우 관련부서의 직하위자가 된다.)

나) 생산비 갱도 : 검수자는 측량과장이 되며 입회자는 지질과장, 개발과장이 된다. 다만, 책임자는 생산부장이 된다.

4) 갱도검수자는 상기하자 유무에 특히 유의할 것이며, 하자가 발생했을 때는 그 하자분에 해당하는 금액을 정확히 산출하여, 석공서식 갱도공사 7호의 갱도공사 검수보고서 하자내역에 기입하고, 검수 내역에서 제외시킨다.

다. 갱도공사 설계 변경

1) 시설비, 개발비, 갱도공사설계 변경

갱도공사 가행 중 작업여건의 변화, 단가의 변화 (인건비, 자재단가 변동 등), 천재지변등 기타 사유로 당초공사의 승인 내역과 달리 시공하여야 할 때는 즉각 설계변경 승인신청을 하되 그 사유를 육하원칙에 의거 명기하여야 한다. 암질 변동에 따른 변경 이외에는 본사의 승인없이 광업소에서 임의 변경 시행할 수 없다.

(암질 변동에 따른 설계변경에 한해서만 선시공을 소장 재량 하에 할 수 있다.)

2) 생산비 갱도공사 설계 변경

갱도공사 시행중 작업 형편상 또는 지질 조건의 급변으로 굴진개소, 방향, 작업량을 변경코자 할 때에는 다음과 같이 소내 품의로 시행한다.

생산부장은 변경요청사유를 석공서식 갱도공사 13호 “굴진(개소, 방향, 작업량) 변경신청서” 와 같이 작성하여 지질과에 제출하면 지질과장은 접수된 신청서의 타당성 여부를 검토후 석공서식 14호 “굴진(개소, 방향, 작업량) <시정, 변경> 명령서”를 작성하여 기획부장, 소장의 결재를 득한 후 당해 생산부장에게 통보한다. 생산비공사의 설계변경도 당사 예산 관리규정에 따라 생산비 굴진 총예산 범위 내에서 광업소장이 할 수 있다.

7. 갱도공사 관계서류 (착공, 검수, 기성고, 준공)및 작성요령

가. 갱도공사 관계서류 서식 (양식 별첨 3 참조)

1) 갱도공사 착공 보고서 (석공서식 갱도공사 6호) 투자사업 신청서식과 동일 요령

단, 도급 계약시는 계약서 사본 첨부(1부)

2) 갱도공사 기성고 보고서 (석공서식 갱도공사 9호)

3) 갱도공사 검수서 (석공서식 갱도공사 7호)

4) 갱도공사 준공 보고서 (석공서식 갱도공사 8호)

5) 갱도공사 설계변경 승인신청 (광업소에서 각2부)

나. 갱도공사 관계서류 작성요령

1) 갱도공사 착공 보고서

ο 비    용 : 시설비, 개발비

ο 시행번호 : 본사 및 광업소 시행 품의번호

2) 갱도공사 기성고 보고서

ο 시 행 자 : 시공부서장 (생산부장) 혹은 시공회사 대표자

ο 시공기간 : 착공일 부터 준 공일까지

3) 갱도공사 검수서

ο 명    칭 : 암질별 A, B, C계 구분

ο 하자내역 : 기술한 하자에 대한 수량, 단가, 금액 및 내역

단, 하자금액, 수량은 기성고 내역에서 제외시킴

4) 갱도공사 준공 보고서 : 착공 보고서와 동일 요령

5) 갱도공사 계획변경 승인 신청

가) 갱도공사 설계변경 계산총괄표 (석공서식 갱도공사 10호)

나) 갱도공사 설계변경 내역일람표 (석공서식 갱도공사 11호)

다) 갱도공사 설계변경 내역서 (석공서식 갱도공사 12호)

시방서, 공종표는 착공보고양식과 동일하고 설계도는 당초 계획도와 변경도를 정확히 나타내야 하고 변경사유도 육하원칙에 의거 작성 2부를 제출한다.

다. 기타

1) 기간공사와 동 부대공사를 합쳐서 단일공사 (기, 전, 토목)로서 도급 공사일 경우 계약서 사본을 첨부하여야 한다.

2) 기, 전, 토목공사 보고는 공사 업무처리요령(예규) 양식에 의한다.

ο 공사 착공보고서 (별지 제3호 서식)

ο 공사 준공보고서 (별지 제4호 서식)

라. 가항의 갱도공사 관계서류 서식 4종(6,7,8,9호)은

매 공사 건당 처리하여야할 서류이며 이외의 보고하여야할 서류로는 기성고 총괄표로서 시설비 및 개발비 기성고 월보에 한해서만 별도로 종전과 같이 각 공사 기성고를 종합하여 작성 보고하여야 한다.

단, 서식 7호의 갱도공사 검수서는 소 자체에서 정기적으로 소내 검수규정에 따라 실시하여 기획부(혹은 주무부)에서 작성하여 서식 9호 갱도 공사 기성고 보고서와 같이 비치하되, 서식 9호 및 7호의 본사보고는 생략하고 준공보고서에 한하여 최종분만 본사에 보고토록 한다.

마. 생산비 갱도공사에 있어서는 이상 서식 작성은 생략한다.

바. 본 갱도규격 및 운용요령이 시행될 때부터 각종서식 (석공서식 갱도 공사 1-14호)을 적용할 수 있도록 개정 사용한다. 동 서식은 규격 268mm×190mm (별첨 서식의 실물크기임)

8. 갱도공사 준공처리 요령

계획된 계산으로 계획된 작업량을 수행하였을 때는 자동적으로 소정절차를 밟아 준공조치 후 보고양식에 의거 지체 없이 보고하고 그렇지 못할 때는 다음과 같이 조치하여야 한다.

가. 암질관계로 인한 설계변경이 아니고 다른 사유로 설계변경을      하여야 할 때

ο 시설비, 개발비공사에 있어서 암질관계로 인한 설계변경이 아니고 작업량, 방향, 시방서, 규격 등의 변경이 요구되는 사항에 대해서는 준공액의 다과를 불문하고 사전 본사의 설계변경 승인을 득한 후에야 소정 절차를 거쳐 준공조치를 할 수 있다.

나. 암질의 설계가 시공결과 차질이 나서 설계변경을 해야 할 때

1) 실적금액이 승인된 계획금액 이상일 때(예비비 제외)는 광업소장 재량 하에 암질 변동내역을 설계 변경하여 준공조치를 해야 한다.

2) 지질변경으로 암종별 굴진계획이 차이가 있어 실적금액이 계획금액보다 초과 되었을시는 준공시킬 수 없으며, 초과에 대한 상세한 근거(갱도암질 계획대실적, 암질변화 요인, 기타 관계자료)를 첨부하여 본사에 설계변경 승인 신청하여야 하고, 승인된 후라야 준공 조치를 할 수 있다.

다. 준공금액이 예산범위내 일 때라도 인건비 및 자재비 간에      전용할 수 없다.

단, 부득이한 경우 자재비중 예산관리 세칙에 의거 예산 범위 내에서 전용 할 수 있다. 다만, 전용내역을 소장 품의(사유 및 산출근거)를 득한 후 준공보고시 첨부하여야 한다. (단, 전력료 제외)

라. 공사 예비비 집행요령

공사 수행 중 예비비를 집행할 필요가 생길 때는 본사의 사전 승인을 득해야만 집행할 수 있다.

별 첨 : 1

가. 굴진갱도 규격

① 목     쉬

② 철     쉬

갱 도 규 격

갱도 종별	지주 종별	작업 조건	암종별	규격	단면적 ㎡		갱도기호
					굴착	유효
수평	목쉬	특수, 일반 조건 으로 구분	연질, 보통 경질 암석 으로 구분	6’×6’	4.139	2.685	수-(보)-1-A, 수-(특)-1-B
				6’×7’	5.107	3.349	수-(보)-2-C, 수-(특)-2-A
				7’×7’	5.762	3.837	수-(보)-3-A, 수-(특)-3-A
				7’×8’	6.761	4.537	수-(보)-4-A, 수-(특)-4-A
				10’×8’	9.308	6.479	수-(보)-5-C, 수-(특)-5-B
				12’×8’	11.043	7.776	수-(보)-6-B, 수-(특)-6-B
	철쉬	상동	상동	2.8×2.1	6.349	5.037	수-(보)-7-A, 수-(특)-7-C
				3.0×2.1	6.454	5.130	수-(보)-8-A, 수-(특)-8-C
				3.0×2.3	6.997	5.695	수-(보)-9-A, 수-(특)-9-B
				3.0×2.4	7.719	6.234	수-(보)-10-B, 수-(특)-10-A
				3.3×2.4	7.779	6.049	수-(보)-11-A, 수-(특)-11-C
				3.0×2.7	8.739	7.134	수-(보)-12-A, 수-(특)-12-B
				3.3×2.7	8.885	7.342	수-(보)-13-A, 수-(특)-13-C
				3.6×2.6	9.174	8.739	수-(보)-14-A, 수-(특)-14-C
				3.8×2.8	10.795	9.090	수-(보)-15-A, 수-(특)-15-C
				4.1×2.8	10.866	9.247	수-(보)-16-A, 수-(특)-16-C
				4.2×2.9	12.107	10.285	수-(보)-17-A, 수-(특)-17-B
				4.5×2.9	12.320	10.462	수-(보)-18-A, 수-(특)-18-C
				4.6×3.05	13.562	11.755	수-(보)-19-C, 수-(특)-19-C
				4.9×3.05	13.803	11.917	수-(보)-20-A, 수-(특)-20-C
중단	목쉬또는 철쉬	상동	상동	6’×6’	4.139	2.685	중단-(보)-1-A, 중단-(특)-1-B
				7’×6’	4.852	3.837	중단-(보)-2-A, 중단-(특)-2-B
				6’×7’	5.107	3.349	중단-(보)-3-C, 중단-(특)-3-A
				7’×7’	5.762	3.837	중단-(보)-4-A, 중단-(특)-4-A
				3.3×2.4	7.779	6.049	중단-(보)-5-A, 중단-(특)-5-A

갱도 종별	지주 종별	작업 조건	암종별	규격	단면적 ㎡		갱도기호
					굴착	유효
사갱	목쉬	상동	상동	6’×7’	5.107	3.349	사-(보)-1-A, 사-(특)-1-A
				7’×7’	5.762	3.837	사-(보)-2-B, 사-(특)-2-A
				7’×8’	6.761	4.537	사-(보)-3-A, 사-(특)-3-B
	철쉬	상동	상동	2.8×2.1	6.349	5.037	사-(보)-4-A, 사-(특)-4-B
				3.0×2.4	7.719	6.234	사-(보)-5-A, 사-(특)-5-C
				3.3×2.4	7.779	6.049	사-(보)-6-C, 사-(특)-6-C
				3.0×2.7	8.739	7.134	사-(보)-7-C, 사-(특)-7-C
				3.3×2.7	8.885	7.342	사-(보)-8-C, 사-(특)-8-C
				3.8×2.56	9.294	7.801	사-(보)-9-C, 사-(특)-9-C
				3.8×2.8	10.795	9.090	사-(보)-10-C, 사-(특)-10-C
				4.2×2.7	11.472	9.660	사-(보)-11-C, 사-(특)-11-C
				4.9×3.05	13.803	11.623	사-(보)-12-C, 사-(특)-12-C
승	목쉬 또는 철쉬 4매쉬	상동	상동	6’×6’	4.139	2.685	승-(보)-1-A, 승-(특)-1-A
				6’×7’	5.107	3.349	승-(보)-2-C, 승-(특)-2-A
				7’×7’	5.762	3.837	승-(보)-3-A, 승-(특)-3-B
				7’×6’ (사매쉬)	4.852	3.837	승-(보)-4-A, 승-(특)-4-B
				2.5×1.9 (사매쉬)	5.940	4.370	승-(보)-5-A, 승-(특)-5-B
				3.3×2.4	7.779	6.049	승-(보)-6-A, 승-(특)-6-B

※ 갱도기호작성 예 : 수 - (보) - 1  - A

①    ②    ③    ④

① : 갱도종별     ② : 굴착조건

③ : 지주규격     ④ : 암종별

목       쉬

철       쉬

별 첨 : 2

나. 갱도 규격별 품셈표

① 수    평

② 중    단

③ 사    갱

④    승

① 수    평

규 격		6´× 6´		굴착단면적		4.139	유효단면적		2.685
구 분			기 호	수 - (보) - 1			수 - (특) - 1
			단 위	수 량			수 량
				A	B	C	A	B	C
인건비	굴착	천공부	공	1.6	1.2	1.0	1.8	1.4	1.1
		경취부	공	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5	1.5
		경운반부	공	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		계	공	3.3	2.9	2.7	3.6	3.2	2.9
	지 주		공		0.9	1.5		1.0	1.6
	배 수 로		공	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	계		공	3.4	3.9	4.3	3.7	4.3	4.6
	제 수 당		%
	인건비계		공
자재비	폭 약		Kg	10	8	6	10	8	6
	뇌 관		개	22	17	13	22	17	13
	도 화 선		m	33	26	20	33	26	20
	갱 목		㎥		0.38	0.51		0.38	0.51
	침 목		㎥	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	Bit		본	0.11	0.08	0.06	0.11	0.08	0.06
	전 력 료		Kwh	60	60	60	60	60	60
	레 일		Kg	30	30	30	30	30	30
	공기구기타		5%
	I-Beam		Kg
	Beam 부속
	자재비계
경 비
합 계

규 격		6´× 7´		굴착단면적		5.107	유효단면적		3.349
구 분			기 호	수 - (보) - 2			수 - (특) - 2
			단 위	수 량			수 량
				A	B	C	A	B	C
인건비	굴착	천공부	공	1.8	1.3	1.1	1.9	1.4	1.2
		경취부	공	1.5	1.5	1.5	1.7	1.7	1.7
		경운반부	공	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		계	공	3.7	3.2	3.0	4.0	3.5	3.3
	지 주		공		0.9	1.5		1.0	1.6
	배 수 로		공	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	계		공	3.8	4.2	4.6	4.1	4.6	5.0
	제 수 당		%
	인건비계		공
자재비	폭 약		Kg	11	8.5	7	11	8.5	7
	뇌 관		개	25	19	15	25	19	15
	도 화 선		m	38	29	23	38	29	23
	갱 목		㎥		0.47	0.70		0.47	0.70
	침 목		㎥	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	Bit		본	0.12	0.09	0.07	0.12	0.09	0.07
	전 력 료		Kwh	60	60	60	60	60	60
	레 일		Kg	30	30	30	30	30	30
	공기구기타		5%
	I-Beam		Kg
	Beam 부속
	자재비계
경 비
합 계

규 격		7´× 7´		굴착단면적		5.762	유효단면적		3.837
구 분			기 호	수 - (보) - 3			수 - (특) - 3
			단 위	수 량			수 량
				A	B	C	A	B	C
인건비	굴착	천공부	공	2.0	1.5	1.3	2.2	1.7	1.4
		경취부	공	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2
		경운반부	공	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
		계	공	3.6	3.1	2.9	3.9	3.4	3.1
	지 주		공		1.0	1.7		1.1	1.9
	배 수 로		공	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	계		공	3.7	4.2	4.7	4.0	4.6	5.1
	제 수 당		%
	인건비계		공
자재비	폭 약		Kg	12	9.5	7.5	12	9.5	7.5
	뇌 관		개	27	21	17	27	21	17
	도 화 선		m	41	32	26	41	32	26
	갱 목		㎥		0.52	0.77		0.52	0.77
	침 목		㎥	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	Bit		본	0.13	0.10	0.08	0.13	0.10	0.08
	전 력 료		Kwh	80	80	80	80	80	80
	레 일		Kg	30	30	30	30	30	30
	공기구기타		5%
	I-Beam		Kg
	Beam 부속
	자재비계
경 비
합 계

규 격		7´× 8´		굴착단면적		6.761	유효단면적		4.537
구 분			기 호	수 - (보) - 4			수 - (특) - 4
			단 위	수 량			수 량
				A	B	C	A	B	C
인건비	굴착	천공부	공	2.1	1.6	1.4	2.3	1.8	1.5
		경취부	공	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2
		경운반부	공	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
		계	공	3.7	3.2	3.0	4.0	3.5	3.2
	지 주		공		1.0	1.7		1.1	1.9
	배 수 로		공	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	계		공	3.8	4.3	4.8	4.1	4.7	5.2
	제 수 당		%
	인건비계		공
자재비	폭 약		Kg	14	11	8.5	14	11	8.5
	뇌 관		개	31	24	19	31	24	19
	도 화 선		m	47	36	29	47	36	29
	갱 목		㎥		0.67	1.00		0.67	1.00
	침 목		㎥	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	Bit		본	0.15	0.12	0.09	0.15	0.12	0.09
	전 력 료		Kwh	100	100	100	100	100	100
	레 일		Kg	30	30	30	30	30	30
	공기구기타		5%
	I-Beam		Kg
	Beam 부속
	자재비계
경 비
합 계

규 격		10´× 8´		굴착단면적		9.308	유효단면적		6.479
구 분			기 호	수 - (보) - 5			수 - (특) - 5
			단 위	수 량			수 량
				A	B	C	A	B	C
인건비	굴착	천공부	공	2.6	1.9	1.7	2.9	2.1	2.0
		경취부	공	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7	1.7
		경운반부	공	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0
		계	공	5.1	4.4	4.2	5.6	4.8	4.7
	지 주		공		1.4	2.3		1.5	2.4
	배 수 로		공	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	계		공	5.3	6.0	6.7	5.8	6.5	7.3
	제 수 당		%
	인건비계		공
자재비	폭 약		Kg	17.5	13.5	11	17.5	13.5	11
	뇌 관		개	39	30	24	39	30	24
	도 화 선		m	78	60	48	78	60	48
	갱 목		㎥		0.92	1.41		0.92	1.41
	침 목		㎥	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
	Bit		본	0.19	0.15	0.12	0.19	0.15	0.12
	전 력 료		Kwh	120	120	120	120	120	120
	레 일		Kg	88	88	88	88	88	88
	공기구기타		5%
	I-Beam		Kg
	Beam 부속
	자재비계
경 비
합 계

규 격		12´× 8´		굴착단면적		11.043	유효단면적		7.776
구 분			기 호	수 - (보) - 6			수 - (특) - 6
			단 위	수 량			수 량
				A	B	C	A	B	C
인건비	굴착	천공부	공	3.0	2.3	1.9	3.3	2.6	2.2
		경취부	공	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8
		경운반부	공	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1
		계	공	5.7	5.0	4.6	6.2	5.5	5.1
	지 주		공		1.6	2.7		1.7	2.9
	배 수 로		공	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	계		공	5.9	6.8	7.5	6.4	7.4	8.2
	제 수 당		%
	인건비계		공
자재비	폭 약		Kg	20	15	12	20	15	12
	뇌 관		개	44	34	27	44	34	27
	도 화 선		m	88	68	54	88	68	54
	갱 목		㎥		1.20	1.87		1.20	1.87
	침 목		㎥	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
	Bit		본	0.22	0.17	0.13	0.22	0.17	0.13
	전 력 료		Kwh	150	150	150	150	150	150
	레 일		Kg	88	88	88	88	88	88
	공기구기타		5%
	I-Beam		Kg
	Beam 부속
	자재비계
경 비
합 계

규 격		2.8 × 2.1		굴착단면적		6.349	유효단면적		5.037
구 분			기 호	수 - (보) - 7			수 - (특) - 7
			단 위	수 량			수 량
				A	B	C	A	B	C
인건비	굴착	천공부	공	2.0	1.5	1.3	2.2	1.7	1.4
		경취부	공	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2
		경운반부	공	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
		계	공	3.6	3.1	2.9	3.9	3.4	3.1
	지 주		공		1.0	1.7		1.1	1.9
	배 수 로		공	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	계		공	3.8	4.3	4.8	4.1	4.7	5.2
	제 수 당		%
	인건비계		공
자재비	폭 약		Kg	13	10	8	13	10	8
	뇌 관		개	29	23	18	29	23	18
	도 화 선		m	44	35	27	44	35	27
	갱 목		㎥		0.29	0.29		0.29	0.29
	침 목		㎥	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	Bit		본	0.14	0.11	0.09	0.14	0.11	0.09
	전 력 료		Kwh	100	100	100	100	100	100
	레 일		Kg	44	44	44	44	44	44
	공기구기타		5%
	I-Beam		Kg		168	280		168	280
	Beam 부속				1.33	2.17		1.33	2.17
	자재비계
경 비
합 계

규 격		3.0 × 2.1		굴착단면적		6.454	유효단면적		5.130
구 분			기 호	수 - (보) - 8			수 - (특) - 8
			단 위	수 량			수 량
				A	B	C	A	B	C
인건비	굴착	천공부	공	2.0	1.5	1.3	2.2	1.7	1.4
		경취부	공	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2
		경운반부	공	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
		계	공	3.6	3.1	2.9	3.9	3.4	3.1
	지 주		공		1.0	1.7		1.1	1.9
	배 수 로		공	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	계		공	3.8	4.3	4.8	4.1	4.7	5.2
	제 수 당		%
	인건비계		공
자재비	폭 약		Kg	13.2	10.2	8.1	13.2	10.2	8.1
	뇌 관		개	30	23	18.0	30	23	18.0
	도 화 선		m	45	36	27.0	45	36	27.0
	갱 목		㎥		0.29	0.29		0.29	0.29
	침 목		㎥	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	Bit		본	0.14	0.11	0.09	0.14	0.11	0.09
	전 력 료		Kwh	100	100	100	100	100	100
	레 일		Kg	44	44	44	44	44	44
	공기구기타		5%
	I-Beam		Kg		168	280		168	280
	Beam 부속				1.33	2.17		1.33	2.17
	자재비계
경 비
합 계

규 격		3.0 × 2.3		굴착단면적		6.997	유효단면적		5.695
구 분			기 호	수 - (보) - 9			수 - (특) - 9
			단 위	수 량			수 량
				A	B	C	A	B	C
인건비	굴착	천공부	공	2.2	1.6	1.4	2.5	1.8	1.6
		경취부	공	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1
		경운반부	공	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
		계	공	3.8	3.2	3.0	4.2	3.5	3.3
	지 주		공		1.2	2.0		1.3	2.2
	배 수 로		공	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	계		공	4.0	4.6	5.2	4.4	5.0	5.7
	제 수 당		%
	인건비계		공
자재비	폭 약		Kg	14	11	8.5	14	11	8.5
	뇌 관		개	31	24	19	31	24	19
	도 화 선		m	47	36	29	47	36	29
	갱 목		㎥		0.32	0.32		0.32	0.32
	침 목		㎥	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	Bit		본	0.15	0.12	0.09	0.15	0.12	0.09
	전 력 료		Kwh	110	110	110	110	110	110
	레 일		Kg	44	44	44	44	44	44
	공기구기타		5%
	I-Beam		Kg		180	294		180	294
	Beam 부속				1.33	2.17		1.33	2.17
	자재비계
경 비
합 계

규 격		3.0 × 2.4		굴착단면적		7.719	유효단면적		6.234
구 분			기 호	수 - (보) - 10			수 - (특) - 10
			단 위	수 량			수 량
				A	B	C	A	B	C
인건비	굴착	천공부	공	2.5	1.9	1.6	2.9	2.2	1.9
		경취부	공	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2
		경운반부	공	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
		계	공	4.2	3.6	3.3	4.7	4.0	3.7
	지 주		공		1.4	2.3		1.5	2.4
	배 수 로		공	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	계		공	4.4	5.2	5.8	4.9	5.7	6.3
	제 수 당		%
	인건비계		공
자재비	폭 약		Kg	15	12	9	15	12	9
	뇌 관		개	34	26	20	34	26	20
	도 화 선		m	51	39	30	51	39	30
	갱 목		㎥		0.35	0.35		0.35	0.35
	침 목		㎥	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	Bit		본	0.17	0.13	0.10	0.17	0.13	0.10
	전 력 료		Kwh	120	120	120	120	120	120
	레 일		Kg	44	44	44	44	44	44
	공기구기타		5%
	I-Beam		Kg		189	315		189	315
	Beam 부속				1.33	2.17		1.33	2.17
	자재비계
경 비
합 계

규 격		3.3 × 2.4		굴착단면적		7.779	유효단면적		6.049
구 분			기 호	수 - (보) - 11			수 - (특) - 11
			단 위	수 량			수 량
				A	B	C	A	B	C
인건비	굴착	천공부	공	2.5	1.9	1.6	2.9	2.2	1.9
		경취부	공	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2
		경운반부	공	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
		계	공	4.2	3.6	3.3	4.7	4.0	3.7
	지 주		공		1.4	2.3		1.5	2.4
	배 수 로		공	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	계		공	4.4	5.2	5.8	4.9	5.7	6.3
	제 수 당		%
	인건비계		공
자재비	폭 약		Kg	15.1	12.1	9.1	15.1	12.1	9.1
	뇌 관		개	34	26	20	34	26	20
	도 화 선		m	51	39	30	51	39	30
	갱 목		㎥		0.35	0.35		0.35	0.35
	침 목		㎥	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	Bit		본	0.17	0.13	0.10	0.17	0.13	0.10
	전 력 료		Kwh	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0
	레 일		Kg	44	44	44	44	44	44
	공기구기타		5%
	I-Beam		Kg		189	315		189	315
	Beam 부속				1.33	2.17		1.33	2.17
	자재비계
경 비
합 계

규 격		3.0 × 2.7		굴착단면적		8.739	유효단면적		7.134
구 분			기 호	수 - (보) - 12			수 - (특) - 12
			단 위	수 량			수 량
				A	B	C	A	B	C
인건비	굴착	천공부	공	2.9	2.1	1.8	3.3	2.3	2.1
		경취부	공	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3
		경운반부	공	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
		계	공	4.9	4.1	3.8	5.4	4.4	4.2
	지 주		공		1.6	2.7		1.8	2.9
	배 수 로		공	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	계		공	5.1	5.9	6.7	5.6	6.4	7.3
	제 수 당		%
	인건비계		공
자재비	폭 약		Kg	17	13	10	17	13	10
	뇌 관		개	37	29	22	37	29	22
	도 화 선		m	56	44	33	56	44	33
	갱 목		㎥		0.35	0.35		0.35	0.35
	침 목		㎥	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	Bit		본	0.18	0.14	0.11	0.18	0.14	0.11
	전 력 료		Kwh	120	120	120	120	120	120
	레 일		Kg	44	44	44	44	44	44
	공기구기타		5%
	I-Beam		Kg		207	345		207	345
	Beam 부속				1.33	2.17		1.33	2.17
	자재비계
경 비
합 계

규 격		3.3 × 2.7		굴착단면적		8.885	유효단면적		7.342
구 분			기 호	수 - (보) - 13			수 - (특) - 13
			단 위	수 량			수 량
				A	B	C	A	B	C
인건비	굴착	천공부	공	2.9	2.1	1.8	3.4	2.3	2.1
		경취부	공	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3
		경운반부	공	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
		계	공	4.9	4.1	3.8	5.5	4.4	4.2
	지 주		공		1.6	2.7		1.8	2.9
	배 수 로		공	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	계		공	5.1	5.9	6.7	5.7	6.4	7.3
	제 수 당		%
	인건비계		공
자재비	폭 약		Kg	17.3	13.2	10.2	17.3	13.2	10.2
	뇌 관		개	38	30	22	38	30	22
	도 화 선		m	57	45	34	57	45	34
	갱 목		㎥		0.35	0.35		0.35	0.35
	침 목		㎥	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	Bit		본	0.18	0.14	0.11	0.18	0.14	0.11
	전 력 료		Kwh	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0
	레 일		Kg	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0
	공기구기타		5%
	I-Beam		Kg		207	345		207	345
	Beam 부속				1.33	2.17		1.33	2.17
	자재비계
경 비
합 계

규 격		3.6 × 2.6		굴착단면적		9.174	유효단면적		8.739
구 분			기 호	수 - (보) - 14			수 - (특) - 14
			단 위	수 량			수 량
				A	B	C	A	B	C
인건비	굴착	천공부	공	3.0	2.2	1.9	3.5	2.4	2.2
		경취부	공	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4
		경운반부	공	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
		계	공	5.1	4.3	4.0	5.7	4.6	4.4
	지 주		공		1.7	2.8		1.9	3.0
	배 수 로		공	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	계		공	5.3	6.2	7.0	5.9	6.7	7.6
	제 수 당		%
	인건비계		공
자재비	폭 약		Kg	17.3	13.2	10.2	17.3	13.2	10.2
	뇌 관		개	38	30	22	38	30	22
	도 화 선		m	57	45	34	57	45	34
	갱 목		㎥		0.35	0.35		0.35	0.35
	침 목		㎥	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	Bit		본	0.18	0.14	0.11	0.18	0.14	0.11
	전 력 료		Kwh	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0
	레 일		Kg	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0
	공기구기타		5%
	I-Beam		Kg		207	345		207	345
	Beam 부속				1.33	2.17		1.33	2.17
	자재비계
경 비
합 계

규 격		3.8 × 2.8		굴착단면적		10.795	유효단면적		9.090
구 분			기 호	수 - (보) - 15			수 - (특) - 15
			단 위	수 량			수 량
				A	B	C	A	B	C
인건비	굴착	천공부	공	3.6	2.6	2.2	4.1	2.9	2.6
		경취부	공	1.5	1.5	1.5	1.6	1.6	1.6
		경운반부	공	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
		계	공	6.1	5.1	4.7	6.7	5.5	5.2
	지 주		공		2.0	3.3		2.2	3.6
	배 수 로		공	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	계		공	6.3	7.3	8.2	6.9	7.9	9.0
	제 수 당		%
	인건비계		공
자재비	폭 약		Kg	21	16	12	21	16	12
	뇌 관		개	46	36	27	46	36	27
	도 화 선		m	69	54	41	69	54	41
	갱 목		㎥		0.35	0.35		0.35	0.35
	침 목		㎥	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
	Bit		본	0.22	0.17	0.14	0.22	0.17	0.14
	전 력 료		Kwh	150	150	150	150	150	150
	레 일		Kg	88	88	88	88	88	88
	공기구기타		5%
	I-Beam		Kg		224	374		224	374
	Beam 부속				1.33	2.17		1.33	2.17
	자재비계
경 비
합 계

규 격		4.1 × 2.8		굴착단면적		10.866	유효단면적		9.247
구 분			기 호	수 - (보) - 16			수 - (특) - 16
			단 위	수 량			수 량
				A	B	C	A	B	C
인건비	굴착	천공부	공	3.6	2.6	2.2	4.1	2.9	2.6
		경취부	공	1.5	1.5	1.5	1.6	1.6	1.6
		경운반부	공	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
		계	공	6.1	5.1	4.7	6.7	5.5	5.2
	지 주		공		2.0	3.3		2.2	3.6
	배 수 로		공	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	계		공	6.3	7.3	8.2	6.9	7.9	9.0
	제 수 당		%
	인건비계		공
자재비	폭 약		Kg	21.1	16.1	12.1	21.1	16.1	12.1
	뇌 관		개	46	36	27	46	36	27
	도 화 선		m	69	54	41	69	54	41
	갱 목		㎥		0.35	0.35		0.35	0.35
	침 목		㎥	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
	Bit		본	0.22	0.17	0.14	0.22	0.17	0.14
	전 력 료		Kwh	150	150	150	150	150	150
	레 일		Kg	88	88	88	88	88	88
	공기구기타		5%
	I-Beam		Kg		224	374		224	374
	Beam 부속				1.33	2.17		1.33	2.17
	자재비계
경 비
합 계

규 격		4.2 × 2.9		굴착단면적		12.107	유효단면적		10.285
구 분			기 호	수 - (보) - 17			수 - (특) - 17
			단 위	수 량			수 량
				A	B	C	A	B	C
인건비	굴착	천공부	공	4.0	2.9	2.4	4.3	3.1	2.7
		경취부	공	1.7	1.7	1.7	1.9	1.9	1.9
		경운반부	공	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1
		계	공	6.7	5.6	5.1	7.3	6.1	5.7
	지 주		공		2.1	3.5		2.3	3.7
	배 수 로		공	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	계		공	7.0	8.0	8.9	7.6	8.7	9.7
	제 수 당		%
	인건비계		공
자재비	폭 약		Kg	21	17	13	21	17	13
	뇌 관		개	47	37	29	47	37	29
	도 화 선		m	71	56	44	71	56	44
	갱 목		㎥		0.35	0.35		0.35	0.35
	침 목		㎥	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
	Bit		본	0.23	0.19	0.14	0.23	0.19	0.14
	전 력 료		Kwh	150	150	150	150	150	150
	레 일		Kg	88	88	88	88	88	88
	공기구기타		5%
	I-Beam		Kg		236	393		236	393
	Beam 부속				1.33	2.17		1.33	2.17
	자재비계
경 비
합 계

규 격		4.5 × 2.9		굴착단면적		12.320	유효단면적		10.462
구 분			기 호	수 - (보) - 18			수 - (특) - 18
			단 위	수 량			수 량
				A	B	C	A	B	C
인건비	굴착	천공부	공	4.1	3.0	2.4	4.4	3.2	2.7
		경취부	공	1.7	1.7	1.7	1.9	1.9	1.9
		경운반부	공	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1
		계	공	6.8	5.7	5.1	7.4	6.2	5.7
	지 주		공		2.1	3.6		2.3	3.8
	배 수 로		공	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	계		공	7.1	8.1	9.0	7.7	8.8	9.8
	제 수 당		%
	인건비계		공
자재비	폭 약		Kg	21.4	17.3	13.2	21.4	17.3	13.2
	뇌 관		개	48	38	30	48	38	30
	도 화 선		m	72	57	45	72	57	45
	갱 목		㎥		0.35	0.35		0.35	0.35
	침 목		㎥	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
	Bit		본	0.23	0.19	0.14	0.23	0.19	0.14
	전 력 료		Kwh	150	150	150	150	150	150
	레 일		Kg	88	88	88	88	88	88
	공기구기타		5%
	I-Beam		Kg		236	393		236	393
	Beam 부속				1.33	2.17		1.33	2.17
	자재비계
경 비
합 계

규 격		4.6 × 3.05		굴착단면적		13.562	유효단면적		11.755
구 분			기 호	수 - (보) - 19			수 - (특) - 19
			단 위	수 량			수 량
				A	B	C	A	B	C
인건비	굴착	천공부	공	4.4	3.3	2.6	4.8	3.6	2.9
		경취부	공	1.8	1.8	1.8	2.0	2.0	2.0
		경운반부	공	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2
		계	공	7.3	6.2	5.5	8.0	6.8	6.1
	지 주		공		2.3	3.9		2.5	4.2
	배 수 로		공	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	계		공	7.6	8.8	9.7	8.3	9.6	10.6
	제 수 당		%
	인건비계		공
자재비	폭 약		Kg	23.5	18	14	23.5	18	14
	뇌 관		개	52	40	31	52	40	31
	도 화 선		m	104	80	62	104	80	62
	갱 목		㎥		0.35	0.35		0.35	0.35
	침 목		㎥	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
	Bit		본	0.26	0.20	0.15	0.26	0.20	0.15
	전 력 료		Kwh	200	200	200	200	200	200
	레 일		Kg	88	88	88	88	88	88
	공기구기타		5%
	I-Beam		Kg		245	409		245	409
	Beam 부속				1.33	2.17		1.33	2.17
	자재비계
경 비
합 계

규 격		4.9 × 3.05		굴착단면적		13.803	유효단면적		11.917
구 분			기 호	수 - (보) - 20			수 - (특) - 20
			단 위	수 량			수 량
				A	B	C	A	B	C
인건비	굴착	천공부	공	4.5	3.4	2.6	4.9	3.7	3.0
		경취부	공	1.8	1.8	1.8	2.0	2.0	2.0
		경운반부	공	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2
		계	공	7.4	6.3	5.5	8.1	6.9	6.2
	지 주		공		2.3	4.0		2.5	4.3
	배 수 로		공	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	계		공	7.7	8.9	9.8	8.4	9.7	10.8
	제 수 당		%
	인건비계		공
자재비	폭 약		Kg	23.9	18.3	14.2	23.9	18.3	14.2
	뇌 관		개	53	41	32	53	41	32
	도 화 선		m	106	81	63	106	81	63
	갱 목		㎥		0.35	0.35		0.35	0.35
	침 목		㎥	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
	Bit		본	0.26	0.20	0.15	0.26	0.20	0.15
	전 력 료		Kwh	200	200	200	200	200	200
	레 일		Kg	88	88	88	88	88	88
	공기구기타		5%
	I-Beam		Kg		245	409		245	409
	Beam 부속				1.33	2.17		1.33	2.17
	자재비계
경 비
합 계

② 중    단

규 격		6´× 6´		굴착단면적		4.139	유효단면적		2.685
구 분			기 호	중단 - (보) - 1			중단 - (특) - 1
			단 위	수 량			수 량
				A	B	C	A	B	C
인건비	굴착	천공부	공	1.6	1.2	1.0	1.8	1.4	1.1
		경취부	공	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7	1.7
		경운반부	공	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		계	공	3.5	3.1	2.9	3.8	3.4	3.1
	지 주		공		1.0	1.7		1.1	1.9
	배 수 로		공	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	계		공	3.6	4.2	4.7	3.9	4.6	5.1
	제 수 당		%
	인건비계		공
자재비	폭 약		Kg	10	8	6	10	8	6
	뇌 관		개	22	17	13	22	17	13
	도 화 선		m	33	26	20	33	26	20
	갱 목		㎥		0.38	0.51		0.38	0.51
	침 목		㎥	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	Bit		본	0.11	0.08	0.06	0.11	0.08	0.06
	전 력 료		Kwh	60	60	60	60	60	60
	레 일		Kg	30	30	30	30	30	30
	공기구기타		5%
	I-Beam		Kg	철쉬 3매쉬 및 4매쉬일 경우 갱목 : 0.29㎥ I-Beam 및 I-Beam 부속 : 철쉬 Set당 제작설계단위적용
	Beam 부속
	자재비계
경 비
합 계

규 격		7´× 6´		굴착단면적		4.852	유효단면적		3.837
구 분			기 호	중단 - (보) - 2			중단 - (특) - 2
			단 위	수 량			수 량
				A	B	C	A	B	C
인건비	굴착	천공부	공	1.8	1.3	1.1	2.0	1.4	1.2
		경취부	공	1.8	1.8	1.8	2.0	2.0	2.0
		경운반부	공	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		계	공	4.0	3.5	3.3	4.4	3.8	3.6
	지 주		공		1.1	1.8		1.2	2.0
	배 수 로		공	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	계		공	4.1	4.7	5.2	4.5	5.1	5.7
	제 수 당		%
	인건비계		공
자재비	폭 약		Kg	12	9.5	7.5	12	9.5	7.5
	뇌 관		개	27	21	17	27	21	17
	도 화 선		m	41	32	26	41	32	26
	갱 목		㎥		0.52	0.77		0.52	0.77
	침 목		㎥	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	Bit		본	0.13	0.10	0.08	0.13	0.10	0.08
	전 력 료		Kwh	80	80	80	80	80	80
	레 일		Kg	30	30	30	30	30	30
	공기구기타		5%
	I-Beam		Kg	철쉬 3매쉬 및 4매쉬일 경우 갱목 : 0.29㎥ I-Beam 및 I-Beam 부속 : 철쉬 Set당 제작설계단위적용
	Beam 부속
	자재비계
경 비
합 계

규 격		6´× 7´		굴착단면적		5.107	유효단면적		3.349
구 분			기 호	중단 - (보) - 3			중단 - (특) - 3
			단 위	수 량			수 량
				A	B	C	A	B	C
인건비	굴착	천공부	공	1.8	1.3	1.1	1.9	1.4	1.2
		경취부	공	1.8	1.8	1.8	2.0	2.0	2.0
		경운반부	공	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		계	공	4.0	3.5	3.3	4.3	3.8	3.6
	지 주		공		1.0	1.7		1.1	1.9
	배 수 로		공	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	계		공	4.1	4.6	5.1	4.4	5.0	5.6
	제 수 당		%
	인건비계		공
자재비	폭 약		Kg	11	8.5	7	11	8.5	7
	뇌 관		개	25	19	15	25	19	15
	도 화 선		m	38	29	23	38	29	23
	갱 목		㎥		0.47	0.70		0.47	0.70
	침 목		㎥	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	Bit		본	0.12	0.09	0.07	0.12	0.09	0.07
	전 력 료		Kwh	60	60	60	60	60	60
	레 일		Kg	30	30	30	30	30	30
	공기구기타		5%
	I-Beam		Kg	철쉬 3매쉬 및 4매쉬일 경우 갱목 : 0.29㎥ I-Beam 및 I-Beam 부속 : 철쉬 Set당 제작설계단위적용
	Beam 부속
	자재비계
경 비
합 계

규 격		7´× 7´		굴착단면적		5.762	유효단면적		3.837
구 분			기 호	중단 - (보) - 4			중단 - (특) - 4
			단 위	수 량			수 량
				A	B	C	A	B	C
인건비	굴착	천공부	공	2.0	1.5	1.3	2.2	1.7	1.4
		경취부	공	2.0	2.0	2.0	2.2	2.2	2.2
		경운반부	공	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
		계	공	4.5	4.0	3.8	4.9	4.4	4.1
	지 주		공		1.1	1.8		1.2	2.0
	배 수 로		공	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	계		공	4.6	5.2	5.7	5.0	5.7	6.2
	제 수 당		%
	인건비계		공
자재비	폭 약		Kg	12	9.5	7.5	12	9.5	7.5
	뇌 관		개	27	21	17	27	21	17
	도 화 선		m	41	32	26	41	32	26
	갱 목		㎥		0.52	0.77		0.52	0.77
	침 목		㎥	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	Bit		본	0.13	0.10	0.08	0.13	0.10	0.08
	전 력 료		Kwh	80	80	80	80	80	80
	레 일		Kg	30	30	30	30	30	30
	공기구기타		5%
	I-Beam		Kg	철쉬 3매쉬 및 4매쉬일 경우 갱목 : 0.29㎥ I-Beam 및 I-Beam 부속 : 철쉬 Set당 제작설계단위적용
	Beam 부속
	자재비계
경 비
합 계

규 격		3.3 × 2.4		굴착단면적		7.779	유효단면적		6.049
구 분			기 호	중단 - (보) - 5			중단 - (특) - 5
			단 위	수 량			수 량
				A	B	C	A	B	C
인건비	굴착	천공부	공	2.7	2.0	1.8	3.0	2.3	1.9
		경취부	공	2.7	2.7	2.7	3.0	3.0	3.0
		경운반부	공	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
		계	공	6.1	5.4	5.2	6.7	6.0	5.6
	지 주		공		1.5	2.4		1.6	2.7
	배 수 로		공	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	계		공	6.2	7.0	7.7	6.8	7.7	8.4
	제 수 당		%
	인건비계		공
자재비	폭 약		Kg	16.0	12.5	10.0	16.0	12.5	10.0
	뇌 관		개	37	28	23	37	28	23
	도 화 선		m	55	43	35	55	43	35
	갱 목		㎥		0.29	0.29		0.29	0.29
	침 목		㎥	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	Bit		본	0.18	0.14	0.11	0.18	0.14	0.11
	전 력 료		Kwh	100	100	100	100	100	100
	레 일		Kg	44	44	44	44	44	44
	공기구기타		5%
	I-Beam		Kg	철쉬 3매쉬 및 4매쉬일 경우 갱목 : 0.29㎥ I-Beam 및 I-Beam 부속 : 철쉬 Set당 제작설계단위적용
	Beam 부속
	자재비계
경 비
합 계

③ 사    갱

규 격		6´× 7´		굴착단면적		5.107	유효단면적		3.349
구 분			기 호	사 - (보) - 1			사 - (특) - 1
			단 위	수 량			수 량
				A	B	C	A	B	C
인건비	굴착	천공부	공	2.6	2.0	1.7	2.9	2.2	1.9
		경취부	공	3.8	3.8	3.8	4.1	4.1	4.1
		경운반부	공
		계	공	6.4	5.8	5.5	7.0	6.3	6.0
	지 주		공		1.3	2.2		1.4	2.4
	배 수 로		공	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	계		공	6.5	7.2	7.8	7.1	7.8	8.5
	제 수 당		%
	인건비계		공
자재비	폭 약		Kg	12.5	9.5	7.5	12.5	9.5	7.5
	뇌 관		개	28	21	17	28	21	17
	도 화 선		m	56	42	34	56	42	34
	갱 목		㎥		0.47	0.70		0.47	0.70
	침 목		㎥	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	Bit		본	0.14	0.10	0.08	0.14	0.10	0.08
	전 력 료		Kwh	80	80	80	80	80	80
	레 일		Kg	30	30	30	30	30	30
	공기구기타		5%
	I-Beam		Kg
	Beam 부속
	자재비계
경 비
합 계

규 격		7´× 7´		굴착단면적		5.762	유효단면적		3.837
구 분			기 호	사 - (보) - 2			사 - (특) - 2
			단 위	수 량			수 량
				A	B	C	A	B	C
인건비	굴착	천공부	공	2.7	2.0	1.7	3.0	2.3	2.1
		경취부	공	4.1	4.1	4.1	4.4	4.4	4.4
		경운반부	공
		계	공	6.8	6.1	5.8	7.4	6.7	6.4
	지 주		공		1.5	2.5		1.7	2.7
	배 수 로		공	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	계		공	6.9	7.7	8.4	7.5	8.5	9.2
	제 수 당		%
	인건비계		공
자재비	폭 약		Kg	13.5	10.5	8	13.5	10.5	8
	뇌 관		개	30	23	18	30	23	18
	도 화 선		m	60	46	36	60	46	36
	갱 목		㎥		0.52	0.77		0.52	0.77
	침 목		㎥	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	Bit		본	0.15	0.11	0.09	0.15	0.11	0.09
	전 력 료		Kwh	100	100	100	100	100	100
	레 일		Kg	44	44	44	44	44	44
	공기구기타		5%
	I-Beam		Kg
	Beam 부속
	자재비계
경 비
합 계

규 격		7´× 8´		굴착단면적		6.761	유효단면적		4.537
구 분			기 호	사 - (보) - 3			사 - (특) - 3
			단 위	수 량			수 량
				A	B	C	A	B	C
인건비	굴착	천공부	공	2.8	2.2	1.8	3.1	2.4	2.1
		경취부	공	4.4	4.4	4.4	4.8	4.8	4.8
		경운반부	공
		계	공	7.2	6.6	6.2	7.9	7.2	6.9
	지 주		공		1.6	2.7		1.7	2.8
	배 수 로		공	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	계		공	7.3	8.3	9.0	8.0	9.0	9.8
	제 수 당		%
	인건비계		공
자재비	폭 약		Kg	15	12	9	15	12	9
	뇌 관		개	34	26	20	34	26	20
	도 화 선		m	68	52	40	68	52	40
	갱 목		㎥		0.67	1.00		0.67	1.00
	침 목		㎥	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	Bit		본	0.17	0.13	0.13	0.17	0.13	0.10
	전 력 료		Kwh	120	120	120	120	120	120
	레 일		Kg	44	44	44	44	44	44
	공기구기타		5%
	I-Beam		Kg
	Beam 부속
	자재비계
경 비
합 계

규 격		2.8 × 2.1		굴착단면적		6.349	유효단면적		5.037
구 분			기 호	사 - (보) - 4			사 - (특) - 4
			단 위	수 량			수 량
				A	B	C	A	B	C
인건비	굴착	천공부	공	2.8	2.2	1.8	3.1	2.4	2.1
		경취부	공	4.3	4.3	4.3	4.7	4.7	4.7
		경운반부	공
		계	공	7.1	6.5	6.1	7.8	7.1	6.8
	지 주		공		1.6	2.7		1.7	2.8
	배 수 로		공	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	계		공	7.3	8.3	9.0	8.0	9.0	9.8
	제 수 당		%
	인건비계		공
자재비	폭 약		Kg	14.5	11	8.5	14.5	11	8.5
	뇌 관		개	32	25	19	32	25	19
	도 화 선		m	64	50	38	64	50	38
	갱 목		㎥		0.29	0.29		0.29	0.29
	침 목		㎥	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	Bit		본	0.16	0.12	0.09	0.16	0.12	0.09
	전 력 료		Kwh	120	120	120	120	120	120
	레 일		Kg	44	44	44	44	44	44
	공기구기타		5%
	I-Beam		Kg		168	280		168	280
	Beam 부속				1.33	2.17		1.33	2.17
	자재비계
경 비
합 계

규 격		3.0 × 2.4		굴착단면적		7.719	유효단면적		6.234
구 분			기 호	사 - (보) - 5			사 - (특) - 5
			단 위	수 량			수 량
				A	B	C	A	B	C
인건비	굴착	천공부	공	3.2	2.4	2.0	3.5	2.6	2.2
		경취부	공	4.8	4.8	4.8	5.2	5.2	5.2
		경운반부	공
		계	공	8.0	7.2	6.8	8.7	7.8	7.4
	지 주		공		2.0	3.3		2.2	3.6
	배 수 로		공	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	계		공	8.2	9.4	10.3	8.9	10.2	11.2
	제 수 당		%
	인건비계		공
자재비	폭 약		Kg	16.5	13	10	16.5	13	10
	뇌 관		개	37	29	22	37	29	22
	도 화 선		m	74	58	44	74	58	44
	갱 목		㎥		0.35	0.35		0.35	0.35
	침 목		㎥	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	Bit		본	0.18	0.14	0.11	0.18	0.14	0.11
	전 력 료		Kwh	150	150	150	150	150	150
	레 일		Kg	44	44	44	44	44	44
	공기구기타		5%
	I-Beam		Kg		189	315		189	315
	Beam 부속				1.33	2.17		1.33	2.17
	자재비계
경 비
합 계

규 격		3.3 × 2.4		굴착단면적		7.779	유효단면적		6.049
구 분			기 호	사 - (보) - 6			사 - (특) - 6
			단 위	수 량			수 량
				A	B	C	A	B	C
인건비	굴착	천공부	공	3.2	2.4	2.0	3.5	2.6	2.2
		경취부	공	4.8	4.8	4.8	5.2	5.2	5.2
		경운반부	공
		계	공	8.0	7.2	6.8	8.7	7.8	7.4
	지 주		공		2.0	3.3		2.2	3.6
	배 수 로		공	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	계		공	8.2	9.4	10.3	8.9	10.2	11.2
	제 수 당		%
	인건비계		공
자재비	폭 약		Kg	16.6	13.1	10.1	16.6	13.1	10.1
	뇌 관		개	37	29	22	37	29	22
	도 화 선		m	75	59	44	75	59	44
	갱 목		㎥		0.35	0.35		0.35	0.35
	침 목		㎥	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	Bit		본	0.18	0.14	0.11	0.18	0.14	0.11
	전 력 료		Kwh	150	150	150	150	150	150
	레 일		Kg	60	60	60	60	60	60
	공기구기타		5%
	I-Beam		Kg		189	315		189	315
	Beam 부속				1.33	2.17		1.33	2.17
	자재비계
경 비
합 계

규 격		3.0 × 2.7		굴착단면적		8.739	유효단면적		7.134
구 분			기 호	사 - (보) - 7			사 - (특) - 7
			단 위	수 량			수 량
				A	B	C	A	B	C
인건비	굴착	천공부	공	3.4	2.4	2.0	3.7	2.6	2.1
		경취부	공	5.2	5.2	5.2	5.7	5.7	5.7
		경운반부	공
		계	공	8.6	7.6	7.2	9.4	8.3	7.8
	지 주		공		2.3	3.8		2.5	4.2
	배 수 로		공	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	계		공	8.8	10.1	11.2	9.6	11.0	12.2
	제 수 당		%
	인건비계		공
자재비	폭 약		Kg	18.5	14	11.5	18.5	14	11.5
	뇌 관		개	41	31	25	41	31	25
	도 화 선		m	82	62	50	82	62	50
	갱 목		㎥		0.35	0.35		0.35	0.35
	침 목		㎥	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	Bit		본	0.20	0.15	0.12	0.20	0.15	0.12
	전 력 료		Kwh	150	150	150	150	150	150
	레 일		Kg	60	60	60	60	60	60
	공기구기타		5%
	I-Beam		Kg		207	345		207	345
	Beam 부속				1.33	2.17		1.33	2.17
	자재비계
경 비
합 계

규 격		3.3 × 2.7		굴착단면적		8.885	유효단면적		7.342
구 분			기 호	사 - (보) - 8			사 - (특) - 8
			단 위	수 량			수 량
				A	B	C	A	B	C
인건비	굴착	천공부	공	3.5	2.4	2.0	3.8	2.6	2.1
		경취부	공	5.3	5.3	5.3	5.8	5.8	5.8
		경운반부	공
		계	공	8.8	7.7	7.3	9.6	8.4	7.9
	지 주		공		2.3	3.9		2.5	4.3
	배 수 로		공	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	계		공	9.0	10.2	11.4	9.8	11.1	12.4
	제 수 당		%
	인건비계		공
자재비	폭 약		Kg	18.8	14.2	11.7	18.8	14.2	11.7
	뇌 관		개	42	32	25	42	32	25
	도 화 선		m	83	63	51	83	63	51
	갱 목		㎥		0.35	0.35		0.35	0.35
	침 목		㎥	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	Bit		본	0.20	0.15	0.12	0.20	0.15	0.12
	전 력 료		Kwh	150	150	150	150	150	150
	레 일		Kg	60	60	60	60	60	60
	공기구기타		5%
	I-Beam		Kg		207	345		207	345
	Beam 부속				1.33	2.17		1.33	2.17
	자재비계
경 비
합 계

규 격		3.8 × 2.56		굴착단면적		9.294	유효단면적		7.801
구 분			기 호	사 - (보) - 9			사 - (특) - 9
			단 위	수 량			수 량
				A	B	C	A	B	C
인건비	굴착	천공부	공	3.6	2.6	2.1	3.9	2.8	2.2
		경취부	공	5.5	5.5	5.5	6.1	6.1	6.1
		경운반부	공
		계	공	9.1	8.1	7.6	10.0	8.9	8.3
	지 주		공		2.4	4.0		2.7	4.5
	배 수 로		공	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	계		공	9.3	10.7	11.8	10.2	11.8	13.0
	제 수 당		%
	인건비계		공
자재비	폭 약		Kg	21.1	15.9	13.1	21.1	15.9	13.1
	뇌 관		개	47	35	29	47	35	29
	도 화 선		m	93	71	57	93	71	57
	갱 목		㎥		0.35	0.35		0.35	0.35
	침 목		㎥	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	Bit		본	0.23	0.17	0.14	0.23	0.17	0.14
	전 력 료		Kwh	150	150	150	150	150	150
	레 일		Kg	60	60	60	60	60	60
	공기구기타		5%
	I-Beam		Kg		224	374		224	374
	Beam 부속				1.33	2.17		1.33	2.17
	자재비계
경 비
합 계

규 격		3.8 × 2.8		굴착단면적		10.795	유효단면적		9.090
구 분			기 호	사 - (보) - 10			사 - (특) - 10
			단 위	수 량			수 량
				A	B	C	A	B	C
인건비	굴착	천공부	공	4.3	3.1	2.5	4.7	3.3	2.7
		경취부	공	6.4	6.4	6.4	7.0	7.0	7.0
		경운반부	공
		계	공	10.7	9.5	8.9	11.7	10.3	9.7
	지 주		공		2.8	4.7		3.1	5.2
	배 수 로		공	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	계		공	10.9	12.5	13.8	11.9	13.6	15.1
	제 수 당		%
	인건비계		공
자재비	폭 약		Kg	23	17.5	14	23	17.5	14
	뇌 관		개	51	38	31	51	38	31
	도 화 선		m	101	77	62	101	77	62
	갱 목		㎥		0.44	0.44		0.44	0.44
	침 목		㎥	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
	Bit		본	0.25	0.19	0.15	0.25	0.19	0.15
	전 력 료		Kwh	150	150	150	150	150	150
	레 일		Kg	120	120	120	120	120	120
	공기구기타		5%
	I-Beam		Kg		224	374		224	374
	Beam 부속				1.33	2.17		1.33	2.17
	자재비계
경 비
합 계

규 격		4.2 × 2.7		굴착단면적		11.472	유효단면적		9.660
구 분			기 호	사 - (보) - 11			사 - (특) - 11
			단 위	수 량			수 량
				A	B	C	A	B	C
인건비	굴착	천공부	공	4.6	3.3	2.7	5.0	3.5	2.9
		경취부	공	6.8	6.8	6.8	7.4	7.4	7.4
		경운반부	공
		계	공	11.4	10.1	9.5	12.4	10.9	10.3
	지 주		공		3.0	5.0		3.3	5.5
	배 수 로		공	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	계		공	11.6	13.3	14.7	12.6	14.4	16.0
	제 수 당		%
	인건비계		공
자재비	폭 약		Kg	24.4	18.6	14.9	24.4	18.6	14.9
	뇌 관		개	54	40	33	54	40	33
	도 화 선		m	107	82	66	107	82	66
	갱 목		㎥		0.44	0.44		0.44	0.44
	침 목		㎥	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
	Bit		본	0.27	0.20	0.16	0.27	0.20	0.16
	전 력 료		Kwh	150	150	150	150	150	150
	레 일		Kg	120	120	120	120	120	120
	공기구기타		5%
	I-Beam		Kg		236	393		236	393
	Beam 부속				1.33	2.17		1.33	2.17
	자재비계
경 비
합 계

규 격		4.9 × 3.05		굴착단면적		13.803	유효단면적		11.623
구 분			기 호	사 - (보) - 12			사 - (특) - 12
			단 위	수 량			수 량
				A	B	C	A	B	C
인건비	굴착	천공부	공	5.5	4.0	3.2	6.0	4.2	3.5
		경취부	공	8.2	8.2	8.2	9.0	9.0	9.0
		경운반부	공
		계	공	13.7	12.2	11.4	15.0	13.2	12.5
	지 주		공		3.6	6.0		4.0	6.6
	배 수 로		공	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	계		공	14.0	16.1	17.7	15.3	17.5	19.4
	제 수 당		%
	인건비계		공
자재비	폭 약		Kg	29.4	22.4	17.9	29.4	22.4	17.9
	뇌 관		개	65	49	40	65	49	40
	도 화 선		m	129	99	79	129	99	79
	갱 목		㎥		0.44	0.44		0.44	0.44
	침 목		㎥	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
	Bit		본	0.32	0.24	0.19	0.32	0.24	0.19
	전 력 료		Kwh	200	200	200	200	200	200
	레 일		Kg	120	120	120	120	120	120
	공기구기타		5%
	I-Beam		Kg		245	409		245	409
	Beam 부속				1.33	2.17		1.33	2.17
	자재비계
경 비
합 계

④  승

규 격		6´× 6´		굴착단면적		4.139	유효단면적		2.685
구 분			기 호	승 - (보) - 1			승 - (특) - 1
			단 위	수 량			수 량
				A	B	C	A	B	C
인건비	굴착	천공부	공	1.7	1.4	1.1	1.8	1.5	1.2
		경취부	공	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0
		경운반부	공
		계	공	2.6	2.3	2.0	2.8	2.5	2.2
	지 주		공		0.9	1.6		1.0	1.7
	배 수 로		공
	계		공	2.6	3.2	3.6	2.8	3.5	3.9
	제 수 당		%
	인건비계		공
자재비	폭 약		Kg	10	7.5	6	10	7.5	6
	뇌 관		개	22	17	13	22	17	13
	도 화 선		m	33	26	20	33	26	20
	갱 목		㎥		0.44	0.65		0.44	0.65
	침 목		㎥		0.03	0.03		0.03	0.03
	Bit		본	0.11	0.08	0.06	0.11	0.08	0.06
	전 력 료		Kwh	60	60	60	60	60	60
	레 일		Kg
	공기구기타		5%
	I-Beam		Kg
	Beam 부속
	자재비계
경 비
합 계

규 격		6´× 7´		굴착단면적		5.107	유효단면적		3.349
구 분			기 호	승 - (보) - 2			승 - (특) - 2
			단 위	수 량			수 량
				A	B	C	A	B	C
인건비	굴착	천공부	공	1.9	1.5	1.2	2.1	1.6	1.3
		경취부	공	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1
		경운반부	공
		계	공	2.9	2.5	2.2	3.2	2.7	2.4
	지 주		공		1.2	2.0		1.3	2.2
	배 수 로		공
	계		공	2.9	3.7	4.2	3.2	4.0	4.6
	제 수 당		%
	인건비계		공
자재비	폭 약		Kg	11	8.5	7	11	8.5	7
	뇌 관		개	25	19	15	25	19	15
	도 화 선		m	38	29	23	38	29	23
	갱 목		㎥		0.49	0.91		0.49	0.91
	침 목		㎥		0.03	0.03		0.03	0.03
	Bit		본	0.12	0.09	0.07	0.12	0.09	0.07
	전 력 료		Kwh	60	60	60	60	60	60
	레 일		Kg
	공기구기타		5%
	I-Beam		Kg
	Beam 부속
	자재비계
경 비
합 계

규 격		7´× 7´		굴착단면적		5.762	유효단면적		3.837
구 분			기 호	승 - (보) - 3			승 - (특) - 3
			단 위	수 량			수 량
				A	B	C	A	B	C
인건비	굴착	천공부	공	2.0	1.6	1.4	2.2	1.8	1.6
		경취부	공	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2
		경운반부	공
		계	공	3.1	2.7	2.5	3.4	3.0	2.8
	지 주		공		1.3	2.2		1.4	2.3
	배 수 로		공
	계		공	3.1	4.0	4.7	3.4	4.4	5.1
	제 수 당		%
	인건비계		공
자재비	폭 약		Kg	12	9.5	7.5	12	9.5	7.5
	뇌 관		개	27	21	17	27	21	17
	도 화 선		m	40	32	26	40	32	26
	갱 목		㎥		0.52	1.02		0.52	1.02
	침 목		㎥		0.03	0.03		0.03	0.03
	Bit		본	0.13	0.10	0.08	0.13	0.10	0.08
	전 력 료		Kwh	80	80	80	80	80	80
	레 일		Kg
	공기구기타		5%
	I-Beam		Kg
	Beam 부속
	자재비계
경 비
합 계

규 격		7´× 6´(사매쉬)		굴착단면적		4.852	유효단면적		3.837
구 분			기 호	승 - (보) - 4			승 - (특) - 4
			단 위	수 량			수 량
				A	B	C	A	B	C
인건비	굴착	천공부	공	1.9	1.5	1.2	2.1	1.6	1.3
		경취부	공	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1
		경운반부	공
		계	공	2.9	2.5	2.2	3.2	2.7	2.4
	지 주		공		1.5	2.5		1.7	2.7
	배 수 로		공
	계		공	2.9	4.0	4.7	3.2	4.4	5.1
	제 수 당		%
	인건비계		공
자재비	폭 약		Kg	12	9.5	7.5	12	9.5	7.5
	뇌 관		개	27	21	17	27	21	17
	도 화 선		m	40	32	26	40	32	26
	갱 목		㎥		0.29	0.29		0.29	0.29
	침 목		㎥		0.03	0.03		0.03	0.03
	Bit		본	0.13	0.10	0.08	0.13	0.10	0.08
	전 력 료		Kwh	80	80	80	80	80	80
	레 일		Kg
	공기구기타		5%
	I-Beam		Kg	철쉬 Set당 제작설계단위적용
	Beam 부속
	자재비계
경 비
합 계

규 격		2.5 × 1.9(사매쉬)		굴착단면적		5.940	유효단면적		4.370
구 분			기 호	승 - (보) - 5			승 - (특) - 5
			단 위	수 량			수 량
				A	B	C	A	B	C
인건비	굴착	천공부	공	2.4	1.8	1.5	2.6	2.0	1.6
		경취부	공	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3
		경운반부	공
		계	공	3.6	3.0	2.7	3.9	3.3	2.9
	지 주		공		1.9	3.1		2.1	3.3
	배 수 로		공
	계		공	3.6	4.9	5.8	3.9	5.4	6.2
	제 수 당		%
	인건비계		공
자재비	폭 약		Kg	15	12	9	15	12	9
	뇌 관		개	33	26	21	33	26	21
	도 화 선		m	49	39	32	49	39	32
	갱 목		㎥		0.36	0.36		0.36	0.36
	침 목		㎥
	Bit		본	0.16	0.12	0.10	0.16	0.12	0.10
	전 력 료		Kwh	100	100	100	100	100	100
	레 일		Kg
	공기구기타		5%
	I-Beam		Kg	철쉬 Set당 제작설계단위적용
	Beam 부속
	자재비계
경 비
합 계

규 격		3.3 × 2.4		굴착단면적		7.779	유효단면적		6.049
구 분			기 호	승 - (보) - 6			승 - (특) - 6
			단 위	수 량			수 량
				A	B	C	A	B	C
인건비	굴착	천공부	공	3.1	2.4	2.0	3.4	2.6	2.1
		경취부	공	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7	1.7
		경운반부	공
		계	공	4.7	4.0	3.6	5.1	4.3	3.8
	지 주		공		2.5	4.1		2.8	4.3
	배 수 로		공
	계		공	4.7	6.5	7.7	5.1	7.1	8.1
	제 수 당		%
	인건비계		공
자재비	폭 약		Kg	19.6	15.7	11.8	19.6	15.7	11.8
	뇌 관		개	43	34	28	43	34	28
	도 화 선		m	64	51	42	64	51	42
	갱 목		㎥		0.36	0.36		0.36	0.36
	침 목		㎥
	Bit		본	0.21	0.16	0.13	0.21	0.16	0.13
	전 력 료		Kwh	100	100	100	100	100	100
	레 일		Kg
	공기구기타		5%
	I-Beam		Kg	철쉬 Set당 제작설계단위적용
	Beam 부속
	자재비계
경 비
합 계

별 첨 : 3

다. 갱도공사 각종보고 양식

양     식

갱도공사 예산(준공)총괄표

공사건명			공 사
총공사금액			원				규격	규격번호			수량	A
												B
												C
												계
자재비	A			인건비	A		예비비	A			합계	A
	B				B			B				B
	C				C			C				C
	계				계			계				계
도 급 공 사							직 영 공 사
공사금액							공사금액
사급	요구매품						자재비	요구매품
	저 장 품							저 장 품
	재 용 품							재 용 품
	소 계							소 계
도급	자 재 비						인건비	정용부노임
	인 건 비
	일반관리비
	이 윤							소 계
	부가가치세						예비비
	소 계
적 요							적 요

(석공서식 갱도공사1호)

갱도공사 예산내역 일람표
공사명						공사금액
종 별		암질	규격	수량	자재비			인건비	계	비고
		A
		B
		C
		계
		A
		B
		C
		계
		A
		B
		C
		계
		A
		B
		C
		계
		A
		B
		C
		계
비 고

(석공서식 갱도공사2호)

갱도공사 예산내역서
구 분			단위	단 가	A( )		B( )		C( )
					수량	금액	수량	금액	수량	금액
공사종별 수 ○ ′ 9 (3.0× 2.7)	인 건 비	굴진부	공
		지주부	〃
		경취부	〃
		경운반부	〃
		기 타	〃
		소 계	〃
		제수당	%
		계	공
	자 재 비	폭 약	Kg
		뇌 관	개
		도화선	m
		갱 목	㎥
		침 목	㎥
		Bit	본
		전력료	K조
		레 일	Kg
		공기구기타	%
		H-Beam	Kg
		" 부속
		계
예 비 비			%
합 계
총 계 (A암종금액×작업량) + (B암종금액×작업량) + (C암종금액×작업량) = 총금액

(석공서식 갱도공사3호)

시 방 서
공사건명	공 사
규 격		갱도 종별	수-(보)-7	작업량	A		시공방법
					B
					C
					계
시방 ″예″ 1. 굴 착 : 갱도는 석공갱도규격 수-(보)-7의 단면적을 굴착하되 붕락 또는 붕괴가 일어나지 않도록 하며 갱도중심과 구배는 측량과의 지시를 받는다. 2. 지 주 : 지주는 수-(보)-7에 표시된 표준규격을 정확히 시공한다. 3. 발 파 : 발파는 발파계원이 하여야 한다. 4. 배수로 : 갱도굴착시 갱도구배에 맞추어 일정규격의 배수로를 굴착하여야 한다. (규격 - 폭 : 깊이: ) 5. 보 안 : 모든 작업은 당공사 보안규정을 준수하여야 한다. 6. 기 타 : 설계도면 및 시방서에 명시되지 않았거나 작업상 의심되는 부분은 해당 생산부장의 지시를 받아 시공 또는 시정하여야 한다.

(석공서식 갱도공사4호)

갱도공사 공정표
공사명	공 사
공사건명	규격	수량(m)	작 업 공 정
			9월			10월			11월			12월
			10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
수(보)-9-A	3.0×2.4	80
수(보)-9-B	"	100
수(보)-9-C	"	20

(석공서식 갱도공사5호)

0.5×3=1.5m/일(67일)

갱도공사 착공보고 내역서

○광기획 : 20 년 월 일 수 신 : 대한석탄공사 ○○광업소 참 조 : 생산안전팀장, 기획조정실장 소 장 ○ ○ ○
공사건명		공 사							비 목
실행번호		본 사					승인일				20 년 월 일
		광업소					시행일				20 년 월 일
시공기간		자 20 년 월 일 자 20 년 월 일 ( 일간)								규격
시공방법						시공부서		소 속
								생산부장 과 장
구 분			승인내역		실 행 내 역
					A			B					C		계
작업량
자재비	직영
	도급
인건비	직영
	도급
예비비	직영
	도급
합 계	직영
	도급
	계

첨 부  : (가) 갱도공사 예산총괄표 1부     (나) 갱도공사 예산내역 일람표 1부

(다) 갱도공사 예산내역서 1부     (라) 시방서1부

(마) 갱도공사 공정표 1부         (바) 갱도공사 시행계획표 1부   (사) 기타

(석공서식 갱도공사6호)

갱 도 공 사  검 수 서

공사건명		공 사												일련번호				본 사
																		광업소
고유번호								규 격								시행번호
비 목				검수 년월일									시공 기간			자20 년 월 일 지20 년 월 일 ( 일간)
작업방법						시공부서										시공자
검 수 자						입회자				인 인
공사금액						전월말 기성고				원						금 차 기성고				원
검 수 내 역															하 자 금 액
명 칭	규격		단위		수량		단가				금액				수량		단가				금액	내역
A
B
C
계
비 고

(석공서식 갱도공사7호)

갱도공사 준공보고서

○광기획 : 20 년 월 일 수 신 : 대한석탄공사 ○○광업소 참 조 : 생산안전팀장, 기획조정실장 소 장 ○ ○ ○
공사건명		공사								비목
실행번호		본사					승인일				20 년 월 일
		광업소					시행일				20 년 월 일
시공기간		자 20 년 월 일 자 20 년 월 일 ( 일간)								규격
시공방법						시공부서			소 속
									생산부장 과장
구분			승인내역		실행내역
					A			B					C		계
작업량	계획
	실적
자재비	직영
	도급
인건비	직영
	도급
예비비	직영
	도급
합계	직영
	도급
	계

첨 부  : (가) 갱도공사 준공내역 일람표 1부   (나) 갱도공사 준공내역서 1부

(다) 갱도공사 공정표 (공사지연시는 지연사유)

(라) 갱도공사 준공도 1부             (마) 갱도공사 검수서 1부   (바) 기타

(석공서식 갱도공사8호)

갱도공사 기성보고서

(     년    월분)

공사건명		공 사											일련번호					본 사
																		광업소
고유번호							규 격										시행번호
비 목				승인금액											시공 기간		자20 년 월 일 지20 년 월 일 ( 일간)
작업방법						시공부처											시공자
접수자		인				입회자				인 인 인
구 분			실행내역		전원말 기성고				금 월 발 생 고										기 성 고 누 계
									A			B		C		계			A		B	C	계
인건비	직영
	도급
자재비	직영
	도급
비	직영
	도급
합 계	직영
	도급
	직계
작 업 량

(석공서식 갱도공사9호)

갱도공사 설계변경 예산총괄표

공사건명				당초			공사
				변경			공사
총공사 금 액				당초			원					규 격	당초								수량	당초					변경
																						A
																						B
				변경			원						변경
																						C
																						계
자재비	당초				변경			인건비	당초		변경			예비비		당초			변경				합계		당초			변경
	A								A							A									A
	B								B							B									B
	C								C							C									C
	계								계							계									계
도 급 공 사														직 영 공 사
구 분						당 초				변 경				구 분						당 초						변 경
공사금액														공사금액
사급		요구매품												자재비			요구매품
		저장품															저장품
		재용품															재용품
		소 계															소 계
도급		자재비												인건비			정용부 노임
		인건비
		제 비															소 계									·
		소 계												예비비
적요														적요

(석공서식 갱도공사 10호)

갱도공사 설계변경 내역일람표
건명	당초				예산금액		당초
							변경
	변경
구분	종 별	규 격	수 량	자재비		인건비		예비비		계
당초
변경
비 고

(석공서식 갱도공사 11호)

개소		(	굴진 방향 작업량		)	변경 신청서			결재		담무	과장		부장
20 년 월 일
1. 당초 및 변경계획
	구분
	당초계획
	변경계획
2. 변경사유 : 3. 당초 및 변경계획도

(석공서식 갱도공사 13호)

굴진		(	개소 방향 작업량		)	시정 변경		신청서				결재		지질과장			기획부장				부소장		소 장
제 호 1. 당초 계획대 변경계획
	구분			개소명			갱도종별				규격							수량				비고
	당초계획
	변경계획
2. 조사확인일 : 20 . . .
3. 시정사항 : 상기와 같이 굴진									(	개소 방향 작업량			)	을	(	시정 변경			)	할 것을 명령함.

……………………………………………절취선…………………………………………………

굴진			(	개소 방향 작업량					)		시정 변경						명령서
제 호 수신 : ○○생산부장 1. 당초 계획대 변경계획
	구 분	개 소 명				갱도종별						규 격							수 량			방 향
	당초계획
	변경계획
2. 조사확인일 : 20 . . .
3. 시정사항 : 상기와 같이 굴진							(	개소 방향 작업량						)	을	(		시정 변경		)	할 것을 명령함.
																	소장 ○ ○ ○ (인)

(석공서식 갱도공사 14호)

대한석탄공사 장성광업소

장광기획 :                                                 20    .    .    .

수    신　: 사    장

참    조 : 생산팀장

제    목 : 장성 -375ML 금천향 전차갱 굴진 (그-6)공사 암질변경에 따른 설계변경

승인신청

-375ML 금천향 전차갱 굴진 (그-6)공사의 실행결과 다음과 같이 실적암질이 계획암질과 상이하여 설계변경코자 승인신청하니 승인하여 주시기 바랍니다.

다              음

구 분 암 질	당 초 금 액			변 경 내 역
	수 량	단 가	금 액	수 량	단 가	금 액
A
B
C
계

첨부 : 암질계획대 실적도 1부

장성광업소장                   인

대 한 석 탄 공 사

생    산 :                                                 20    .    .    .

수    신　: 장성광업소장

제    목 : 장성 -375ML 금천향 전차갱 암질변경에 따른 설계변경 승인

장광기획○○○(○○.○.○.)호로 설계변경 신청한 공사를 다음과 같이 변경

승인하니 작업에 철저를 기할 것.

다              음

구 분 암 질	당 초 금 액			변 경 내 역
	수 량	단 가	금 액	수 량	단 가	금 액
A
B
C
계

대한석탄공사 사장

Ⅱ. 채 탄, 보 갱

Ⅱ. 채탄, 보갱

1. 목적	135

2. 채탄 갱도규격	135

가. 채탄 갱도규격	135

나. 채탄 갱도규격별 갱목 산출내역	135

3. 작업별 화약 목재 소비기준표	135

가. 채탄	135

나. 보갱	135

4. 적용방법

1. 목적

채탄갱도의 사용목적에 따라 갱도규격을 통일하고 영달된 예산을 효율적으로 사용키 위하여 재료비중 구성비가 큰 화약 및 목재류에 대하여 적정 소비기준을 작업종별 규격별 조건별로 세분설정하므로써 통계분석과 물자의 소비통제를 강화케 할 수 있어 원가의 절감을 기할 수 있음은 물론 본 소비기준을 토대로 한 사용기준을 설정하여 생산작업을 윈활히 수행하는데 그 목적이 있음.

2. 채탄갱도규격

다음 규격은 채탄갱도에 적용한다.

가. 채탄갱도규격

나. 채탄갱도규격별 갱목산출내역

3. 작업별 화약, 목재, 소비기준표

채탄, 보갱은 다음 소비기준표에 의하고 굴진갱도규격에 준한다.

4. 적용방법

채탄갱도규격 및 화약, 목재 소비기준표를 적용하는 방법은 다음과 같다.

가. 채탄갱도 규격

◎ 화약, 목재 소비기준표

가. 채   탄

나. 보   갱

가. 채    탄

(단위 : 폭약Kg, 뇌관개,  목재㎥)

작업 량	종별	규격		급별	쉬간 cm	출탄량 (M/T)		화약류				목재류
		규격	번호			쉬당	M당	쉬당		M당		쉬당	M당
								폭약	뇌관	폭약	뇌관
(1) 채 탄	(가) 승 채 준	5´×6´ (2매쉬)	승채-1-A	A	75	1.1	1.5	2.3	6	3.1	8	0.153	0.204
					60	0.9	1.5	1.5	4	2.5	6	0.140	0.233
					40	0.6	1.5	0.6	2	1.4	4	0.122	0.305
			승채-1-B	B	75	2.3	3.1	1.9	4	2.5	6	0.153	0.204
					60	1.9	3.1	1.1	3	1.8	5	0.140	0.233
					40	1.2	3.1	0.3	1	0.7	2	0.122	0.305
			승채-1-C	C	75	3.5	4.7	1.2	4	1.6	5	0.153	0.204
					60	2.8	4.7	0.7	2	1.2	4	0.140	0.233
					40	1.9	4.7	-	-	-	-	0.122	0.305
		6´×6´ (3매쉬)	승채-2-A	A	75	1.9	2.5	3.7	9	4.9	12	0.323	0.431
					60	1.5	2.5	2.3	6	3.9	10	0.303	0.505
					40	1.0	2.5	0.9	3	2.2	7	0.275	0.688
			승채-2-B	B	75	3.7	4.9	2.9	7	3.9	10	0.323	0.431
					60	2.9	4.9	1.7	5	2.8	8	0.303	0.505
					40	2.0	4.9	0.4	1	1.1	3	0.275	0.688
			승채-2-C	C	75	5.6	7.4	1.9	6	2.5	8	0.323	0.431
					60	4.4	7.4	1.2	4	2.0	6	0.303	0.505
					40	3.0	7.4	-	-	-	-	0.275	0.688
		6´×5´ (4매쉬)	승채-3-A	A	40	0.8	2.1	1.7	5	4.2	12	0.296	0.740
			승채-3-B	B	40	1.6	4.1	1.0	4	2.5	9	0.296	0.740
			승채-3-C	C	40	2.5	6.2	-	-	-	-	0.296	0.740
	(나) 연 층 채 준	6´×6´ (3매쉬)	연채-1-A	A	75	1.9	2.5	3.7	9	4.9	12	0.277	0.369
					60	1.5	2.5	2.3	6	3.9	10	0.257	0.428
					40	1.0	2.5	0.9	3	2.2	7	0.229	0.573
			연채-1-B	B	75	3.7	4.9	2.9	7	3.9	10	0.277	0.369
					60	2.9	4.9	1.7	5	2.8	8	0.257	0.428
					40	2.0	4.9	0.4	1	1.1	3	0.229	0.573
			연채-1-C	C	75	5.6	7.4	1.9	6	2.5	8	0.277	0.369
					60	4.4	7.4	1.2	4	2.0	6	0.257	0.428
					40	3.0	7.4	-	-	-	-	0.229	0.369

(단위 : 폭약Kg, 뇌관개,  목재㎥)

작업 량	종별	규격		급별	쉬간 cm	출탄량 (M/T)		화약류				목재류
		규격	번호			쉬당	M당	쉬당		M당		쉬당	M당
								폭약	뇌관	폭약	뇌관
(1) 채 탄	(나) 연 층 채 준	6´×7´ (3매쉬)	연채-2-A	A	75	2.4	3.2	4.7	12	6.3	16	0.363	0.484
					60	1.9	3.2	3.0	8	5.0	13	0.335	0.558
					40	1.3	3.2	1.2	3	2.9	8	0.299	0.748
			연채-2-B	B	75	4.7	6.3	3.7	10	5.0	13	0.363	0.484
					60	3.8	6.3	2.1	7	3.6	11	0.335	0.558
					40	2.5	6.3	0.6	2	1.4	4	0.299	0.748
			연채-2-C	C	75	7.1	9.5	2.4	7	3.2	10	0.363	0.484
					60	5.7	9.5	1.5	4	2.5	7	0.335	0.558
					40	3.8	9.5	-	-	-	-	0.299	0.748
		7´×7´ (3매쉬)	연채-3-A	A	75	2.6	3.4	5.2	13	6.9	17	0.403	0.537
					60	2.0	3.4	3.3	8	5.5	14	0.372	0.620
					40	1.4	3.4	1.2	4	3.1	9	0.332	0.830
			연채-3-B	B	75	5.1	6.8	4.1	10	5.5	14	0.403	0.537
					60	4.1	6.8	2.3	7	3.9	12	0.372	0.620
					40	2.7	6.8	0.6	2	1.6	5	0.332	0.830
			연채-3-C	C	75	7.7	10.2	2.6	7	3.5	10	0.403	0.537
					60	6.1	10.2	1.6	5	2.7	8	0.372	0.620
					40	4.1	10.2	-	-	-	-	0.332	0.830
		7´×8´ (3매쉬)	연채-4-A	A	75	3.2	4.2	6.1	15	8.1	20	0.455	0.607
					60	2.5	4.2	3.8	10	6.4	16	0.419	0.698
					40	1.7	4.2	1.5	4	3.7	11	0.371	0.928
			연채-4-B	B	75	6.3	8.4	4.8	12	6.4	16	0.455	0.607
					60	5.0	8.4	2.7	8	4.6	14	0.419	0.698
					40	4.4	8.4	0.7	2	1.8	5	0.371	0.928
			연채-4-C	C	75	9.5	12.6	3.1	9	4.1	12	0.455	0.607
					60	7.6	12.6	1.9	5	3.2	9	0.419	0.698
					40	5.1	12.6	-	-	-	-	0.371	0.928

(단위 : 폭약Kg, 뇌관개,  목재㎥)

작업 량	종별	규격		급별	쉬간 cm	출탄량 (M/T)		화약류				목재류
		규격	번호			쉬당	M당	쉬당		M당		쉬당	M당
								폭약	뇌관	폭약	뇌관
(1) 채 탄	(나) 연 층 채 준	2.8×2.1 (2매쉬)	연채-5-A	A	75	2.9	3.9	5.7	14	7.6	18	0.404	0.538
					60	2.4	3.9	3.5	9	5.9	15	0.379	0.631
					40	1.6	3.9	1.4	5	3.5	12	0.344	0.859
			연채-5-B	B	75	5.8	7.7	4.4	11	5.9	14	0.404	0.538
					60	4.6	7.7	2.6	8	4.3	13	0.379	0.631
					40	3.1	7.7	0.6	2	1.5	4	0.344	0.859
			연채-5-C	C	75	8.5	11.3	2.9	9	3.9	12	0.404	0.538
					60	6.8	11.3	1.8	6	3.1	10	0.379	0.631
					40	4.5	11.3	-	-	-	-	0.344	0.859
		3.3×2.4 (2매쉬)	연채-6-A	A	75	3.6	4.8	7.0	17	9.3	23	0.470	0.626
					60	2.9	4.8	4.3	11	7.2	19	0.441	0.734
					40	1.9	4.8	1.7	6	4.2	14	0.400	1.00
			연채-6-B	B	75	7.1	9.5	5.5	13	7.3	18	0.470	0.626
					60	5.7	9.5	3.2	9	5.3	16	0.441	0.734
					40	3.8	9.5	0.8	2	1.9	5	0.400	1.00
			연채-6-C	C	75	10.4	13.9	3.6	11	4.8	15	0.470	0.626
					60	8.3	13.9	2.3	8	3.8	13	0.441	0.734
					40	5.5	13.9	-	-	-	-	0.400	1.00
		3.8×2.6 (3매쉬)	연채-7-A	A	75	4.3	5.8	8.3	20	11.1	27	0.533	0.711
					60	3.5	5.8	5.2	13	8.6	22	0.500	0.834
					40	2.3	5.8	2.0	7	5.1	17	0.454	1.135
			연채-7-B	B	75	8.5	11.3	6.5	16	8.7	21	0.533	0.711
					60	6.8	11.3	3.8	11	6.4	19	0.500	0.834
					40	4.5	11.3	0.9	2	2.2	6	0.454	1.135
			연채-7-C	C	75	12.4	16.6	4.3	13	5.7	18	0.533	0.711
					60	9.9	16.6	2.7	9	4.5	15	0.500	0.834
					40	6.6	16.6	-	-	-	-	0.454	1.135

(단위 : 폭약Kg, 뇌관개,  목재㎥)

작업 량	종별	규격		급별	쉬간 cm	출탄량 (M/T)		화약류				목재류
		규격	번호			쉬당	M당	쉬당		M당		쉬당	M당
								폭약	뇌관	폭약	뇌관
(1) 채 탄	(나) 연 층 채 준	3.9×2.6 (3매쉬)	연채-8-A	A	75	4.4	5.9	8.5	21	11.4	28	0.547	0.730
					60	3.5	5.9	5.3	14	8.8	23	0.513	0.855
					40	2.4	5.9	2.1	7	5.2	17	0.466	1.165
			연채-8-B	B	75	8.7	11.6	6.7	16	8.9	22	0.547	0.730
					60	7.0	11.6	3.9	12	6.5	19	0.513	0.855
					40	4.6	11.6	0.9	2	2.3	6	0.466	1.165
			연채-8-C	C	75	12.7	17.0	4.4	14	5.8	18	0.547	0.730
					60	10.2	17.0	2.8	9	4.6	15	0.513	0.855
					40	6.8	17.0	-	-	-	-	0.466	1.165

(단위 : 폭약Kg, 뇌관개,  목재㎥)

작업 량	종별	규격		급별	쉬간 cm	출탄량 (M/T)		화약류				목재류
		규격	번호			쉬당	M당	쉬당		M당		쉬당	M당
								폭약	뇌관	폭약	뇌관
(1) 채 탄	(다) 승 보 수	5´×6´ (2매쉬)	승채보-1-A	A	75							0.153	0.204
					60							0.140	0.233
					40							0.122	0.305
			승채보-1-B	B	75							0.153	0.204
					60							0.140	0.233
					40							0.122	0.305
			승채보-1-C	C	75							0.153	0.204
					60							0.140	0.233
					40							0.122	0.305
		6´×6´ (3매쉬)	승채보-2-A	A	75							0.323	0.431
					60							0.303	0.505
					40							0.275	0.688
			승채보-2-B	B	75							0.323	0.431
					60							0.303	0.505
					40							0.275	0.688
			승채보-2-C	C	75							0.323	0.431
					60							0.303	0.505
					40							0.275	0.688
		6´×5´ (4매쉬)	승채보-3-A	A	75							0.296	0.740
			승채보-3-B	B	60							0.296	0.740
			승채보-3-C	B	40							0.296	0.740
		6´×6´ (3매쉬) (반목적)	승채보-4-A	B	75							0.553	0.737
					60							0.487	0.812
					40							0.398	0.995
			승채보-4-B	C	75							0.553	0.737
					60							0.487	0.812
					40							0.398	0.995
			승채보-4-C	C	75							0.553	0.737
					60							0.487	0.812
					40							0.398	0.995

(단위 : 폭약Kg, 뇌관개,  목재㎥)

작업 량	종별	규격		급별	쉬간 cm	출탄량 (M/T)		화약류				목재류
		규격	번호			쉬당	M당	쉬당		M당		쉬당	M당
								폭약	뇌관	폭약	뇌관
(1) 채 탄	(라) 연 층 보 수	6´×6´ (3매쉬)	연채보-1-A	A	75							0.277	0.369
					60							0.257	0.428
					40							0.229	0.573
			연채보-1-B	B	75							0.277	0.369
					60							0.257	0.428
					40							0.229	0.573
			연채보-1-C	C	75							0.277	0.369
					60							0.257	0.428
					40							0.229	0.573
		6´×7´ (3매쉬)	연채보-2-A	A	75							0.340	0.453
					60							0.317	0.528
					40							0.287	0.717
			연채보-2-B	B	75							0.340	0.453
					60							0.317	0.528
					40							0.287	0.717
			연채보-2-C	C	75							0.340	0.453
					60							0.317	0.528
					40							0.287	0.717
		7´×7´ (3매쉬)	연채보-3-A	B	75							0.390	0.507
					60							0.354	0.590
					40							0.320	0.800
			연채보-3-B	C	75							0.380	0.507
					60							0.354	0.590
					40							0.320	0.800
			연채보-3-C	C	75							0.380	0.507
					60							0.354	0.590
					40							0.320	0.800

(단위 : 폭약Kg, 뇌관개,  목재㎥)

작업 량	종별	규격		급별	쉬간 cm	출탄량 (M/T)		화약류				목재류
		규격	번호			쉬당	M당	쉬당		M당		쉬당	M당
								폭약	뇌관	폭약	뇌관
(1) 채 탄	(라) 연 층 보 수	7´×8´ (3매쉬)	연채보-4-A	A	75							0.432	0.576
					60							0.401	0.668
					40							0.359	0.897
			연채보-4-B	B	75							0.432	0.576
					60							0.401	0.668
					40							0.359	0.897
			연채보-4-C	C	75							0.432	0.576
					60							0.401	0.668
					40							0.359	0.897
	(마) 케 빙	6´×6´ (3매쉬)	승채케-2-A	A
			승채케-2-B	B
			승채케-2-C	C
			연채케-1-A	A
			연채케-1-B	B
			연채케-1-C	C
		6´×7´ (3매쉬)	연채케-2-A	A
			연채케-2-B	B
			연채케-2-C	C
		7´×7´ (3매쉬)	연채케-3-A	A
			연채케-3-B	B
			연채케-3-C	C
		7´×8´ (3매쉬)	연채보-4-A	A
			연채보-4-B	B
			연채보-4-C	C

※ Caving 기준작성 요령 : 예산서에 채탄전체로 승인된 때에는 광업소 기획과

에서 위 표와 같이 규격별, 급별로 조정한다.

케빙 = 채탄전체 - (채준+보수+기타)

※ 굴진의 화약, 목재 소비기준은 굴진갱도규격 품셈표에 준한다.

나. 보    갱

(    ) 는  m당 임

작업별	종별	규격		쉬당 화약류		쉬당목재(㎥)			쉬당 H-Beam(Kg)
		규격	번호	폭약	뇌관	생수	재생목	계	신품	재생품	계
(3) 암 석 보 갱	(가) 수평	6´×6´	수보수1-B					0.28(0.38)
			수보수1-C					0.23(0.51)
		6´×7´	수보수2-B					0.35(0.47)
			수보수2-C					0.31(0.70)
		7´×7´	수보수3-B					0.39(0.52)
			수보수3-C					0.35(0.77)
		7´×8´	수보수4-B					0.50(0.67)
			수보수4-C					0.45(1.00)
		10´×8´	수보수5-B					0.69(0.92)
			수보수5-C					0.64(1.41)
		12´×8´	수보수6-B					0.90(1.20)
			수보수6-C					0.84(1.87)
		2.8×2.1	수보수7-B					0.22(0.29)			126(168)
			수보수7-C					0.13(0.29)			126(280)
		3.0×2.3	수보수7-1-B					0.22(0.29)			101(135)
			수보수7-1-C					0.13(0.29)			101(301)
		3.0×2.4	수보수8-B					0.26(0.35)			142(189)
			수보수8-C					0.16(0.35)			142(315)
		3.3×2.4	수보수9-B					0.26(0.35)			146(194)
			수보수9-C					0.16(0.35)			146(324)
		3.0×2.7	수보수10-B					0.26(0.35)			155(207)
			수보수10-C					0.16(0.35)			155(345)

(    ) 는  m당 임

작업별	종별	규격		쉬당 화약류		쉬당목재(㎥)			쉬당 H-Beam(Kg)
		규격	번호	폭약	뇌관	생수	재생목	계	신품	재생품	계
(3) 암 석 보 갱	(가) 수평	3.3×2.7	수보수11-B					0.26(0.35)			155(207)
			수보수11-C					0.16(0.35)			155(345)
		3.8×2.8	수보수12-B					0.26(0.35)			165(220)
			수보수12-C					0.16(0.35)			165(336)
		4.2×2.9	수보수13-B					0.26(0.35)			177(236)
			수보수13-C					0.16(0.35)			177(393)
		4.6×3.05	수보수14-B					0.26(0.35)			184(245)
			수보수14-C					0.16(0.35)			184(409)
		4.4×4.6	수특수15-B					0.62(0.83)			248(331)
			수특수15-C					0.67(0.83)			248(552)
		6.0×3.8	수특수16-B					0.64(0.86)			234(312)
			수특수16-C					0.39(0.86)			234(520)
		7.0×5.0	수특수17-B					0.99(1.32)			311(414)
			수특수17-C					0.59(1.32)			311(690)
		8.0×5.0	수특수18-B					1.09(1.46)			311(414)
			수특수18-C					0.65(1.46)			311(690)
	(나) 사갱	6´×7´	사보수1-B					0.35(0.47)
			사보수1-C					0.32(0.70)
		7´×7´	사보수2-B					0.39(0.52)
			사보수2-C					0.35(0.77)
		7´×8´	사보수3-B					0.50(0.67)
			사보수3-C					0.50(1.00)
		3.8×2.8	사보수4-B					0.22(0.29)			81(108)
			사보수4-C					0.13(0.29)			81(108)

(    ) 는  m당 임

작업별	종별	규격		쉬당 화약류		쉬당목재(㎥)			쉬당 H-Beam(Kg)
		규격	번호	폭약	뇌관	생수	재생목	계	신품	재생품	계
(3) 암 석 보 갱	(나) 사갱	3.0×2.4	사보수5-B					0.26(0.35)			165(220)
			사보수5-C					0.16(0.35)			165(336)
		3.3×2.4	사보수6-B					0.26(0.35)			177(236)
			사보수6-C					0.16(0.35)			177(393)
		3.0×2.7	사보수7-B					0.26(0.35)			184(245)
			사보수7-C					0.16(0.35)			184(409)
		3.8×2.8	사보수8-B					0.62(0.83)			248(331)
			사보수8-C					0.67(0.83)			248(552)
		6´×6´	승보수1-B					0.64(0.86)			234(312)
			승보수1-C					0.39(0.86)			234(520)
		6´×7´	승보수2-B					0.99(1.32)			311(414)
			승보수2-C					0.59(1.32)			311(690)
		7´×7´	승보수3-B					1.09(1.46)			311(414)
			승보수3-C					0.65(1.46)			311(690)

4. 적용방법

가. 채탄갱도규격

채탄갱도를 시공할때는 채탄갱도 규격에 준하여 시공하여야 하며 작업조건에 따라 구격이외 소규격(삼매쉬중 5′×5′, 5′×4′)의 시공이 불가피할 때는 사전에 소규격 시공이유와 소규격 작업량을 갱에서 기획과로 통보한다.

기획과에서 영달받은 예산을 적의 조정하고 갱목 소규격 구입이 필요할 때는 해당부서와 협의 조정 공급토록 한다.

나. 화약, 목재, 소비기준

3항 화약, 목재, 소비기준표와 같이 작업별, 작업종별, 규격별, 급별, 쉬간별로 세분하여 본소비기준을 영달받은 예산범위내에서 적용한다.

(1) 작업별 : 채탄, 굴진, 보갱

(2) 작업종별 : 채탄 (승채준, 연층채준, 승보수, 연층보수, 케빙)

굴진 (수평, 사갱, 승)

보갱 (수평, 사갱, 승)

(3) 규격별 : 이상 작업종별을 규격별로 구분한다.

(4) 급별 : 채탄작업에 있어 이상 규격을 탄의 상태에 따라 다음과 같이 구분한다.

A급 : 협탄

협탄이라함은 막장 1/3이하의 탄으로 탄폭 약 60cm 이하

B급 : 반탄

반탄이라함은 막장 1/3이상 2/3이하의 탄으로 탄폭 약 60cm～120cm

C급 : 전탄

전탄이라함은 막장 2/3이상 전탄으로 탄폭 약 120cm 이상 전면탄

(5) 쉬간별 : 채탄작업에 있어 이상 급별을 다시 탄 및 암석 경연에 따라 다음과 같이 적용한다.

쉬간75cm : 탄 갱도에 중압이 많이 오지 않는 괴탄 및 굳은 분탄갱도와 협탄 및 반탄에서는 암석이 사질혈암과 같이 경질인 것.

쉬간60cm : 갱도에 중압이 보통인 탄층갱도의 협탄 및 반탄에서는 암석이 사질혈암 탄질경암 등으로 섞여 있는것.

쉬간40cm : 갱도에 중압이 심하게 걸리는 탄층갱도와 협탄 및 반타 에서는 암석이 연질혈암, 탄질혈암 등 인 것.

(6) 굴진, 보갱은 굴진갱도규격 품셈표에 의거 규격별 급별로만 구분하여 소비기준을 적용한다.

참고 : #1

○ 광산지보용 I 형강 (I Section Steel for Mine Support)

(한국산업규격 KS E 4002)

- 적용범위 : 이 규격은 광산에서 사용하는 광산지보용 I 형강

(G-I Beam)에 대하여 규정

- 규격 및 종류

단면치수(mm)						단면적 (㎠)	단위무게 (kg/m)
A	B	t	[eqn: rm t` _{`2}]	r	[eqn: rm r _ 2]
100	80	9	12.5	13	4	26.4	20.7
110	84	10	14	14	5	31.1	24.5
120	92	11	15.5	15	6	37.6	29.5
130	100	12	17	16	7	44.6	35.0
140	110	12	19	17	8	53.0	41.6

※ 무게는 강의 비중을 7.85Kg/d㎥ 로 보고 단면적 계산

- 그 림

○ 광산지보용 이음판 (Fish Plates for Mine Support)

(한국산업규격 KS E 4003)

- 적용범위 : 이 규격은 광산에서 사용하는 광산지보용 형강의 이음판 및 4각 볼트 너트에 대하여 규정

- 규격 및 종류

(단위:mm)

두께	a	b	r	t	개당무게(Kg)
9mm 이음판	67	35	13	9	2.94
12mm 이음판	60	35	13	12	3.82

[그림1]

단 면 형 상

[그림2]

(단위:mm)

종류	L	l	[eqn: rm l_2]	[eqn: rm l_3]	g	h	R
1종	400	40	100	120	32	22	1,400

참고 : #2

○ 경량레일 (Light Rails)

(한국산업규격 KS R 9101)

- 적용범위 : 이 규격은 탄소강의 경량레일에 대하여 규정

- 규격 및 종류

종류	기호	비고	표준길이 m	비고
		단위질량 Kg/m		짧은길이 m
6Kg 레일	6	5.98	5.5	5 4.5
9Kg 레일	9	8.94
10Kg 레일	10	10.1
12Kg 레일	12	12.2	10.0	9 8 7 6
15Kg 레일	15	15.2
22Kg 레일	22	22.3

비고 : 10Kg 레일은 될 수 있는 한 사용하지 않는다.

- 그림

부도1 6Kg 레일      단위:mm

부도2 9Kg 레일      단위:mm

부도3 10Kg 레일      단위:mm

부도4 12Kg 레일      단위:mm

부도5 15Kg 레일      단위:mm

부도6 22Kg 레일      단위:mm

참고 : #3

○ 레일 (Rails)

(한국산업규격 KS R 9106)

- 적용범위 : 이 규격은 선로에서 사용하는 보통 레일에 대하여 규정

- 규격 및 종류

종류	기호	비고	표준길이 m	비고
		단위질량 Kg/m		짧은길이 m
30Kg 레일	30A	30.1	10
37Kg 레일	37A	37.2	25
40KgN 레일	40N	40.9
50Kg 레일	50PS	50.4
50KgN 레일	50N	50.4	25.50
60Kg 레일	60	60.8

비고 : 40KgN 레일 및 50KgN 레일을 총칭하여 “N레일”로 부른다.

- 그림

부도1 30Kg 레일      단위:mm

참고 : #4

○ 배관용 탄소강관 (한국산업규격 KS D 3507)

- 적용범위 : 이 규격은 사용압력이 비교적 낮은 증기, 물, 기름, 가스, 공기 등의 배관에 사용하는 탄소광관에 대하여 규정.

- 종류 및 기호 : 관의 종류는 1종으로 하고 기호는 표와 같다. 아연도금의 유무에 따라 흑관, 백관으로 구분.

표1 종류 및 기호

종류의 기호	구분	비고
SPP	흑관	아연도금을 하지 않은 관
	백관	흑관에 아연도금을 한관

비고 : 도면, 대장 ․ 전표 등에 기호로 백관을 구분 할 필요가 있을 경우에는, 종류의 기호 끝에 -ZN 을 부기한다. 다만, 제품의 표시에는 적용하지 않는다.

- 규격

호칭지름		바깥 지름 mm	바깥지름의 허용차		두께 mm	두께의 허용차	소켓을 포함치 않은 무게 Kg/m
A	B		테이퍼나사관	기타관
6	1/8	10.5	±0.5mm	±0.5mm	2.00	+규정하지 않음 -12.5%	0.419
8	1/4	13.8	±0.5mm	±0.5mm	2.35		0.664
10	3/8	17.3	±0.5mm	±0.5mm	2.35		0.866
15	1/2	21.7	±0.5mm	±0.5mm	2.65		1.25
20	3/4	27.2	±0.5mm	±0.5mm	2.65		1.60
25	1	34.0	±0.5mm	±0.5mm	3.25		2.45
32	1 1/4	42.7	±0.5mm	±0.5mm	3.25		3.16
40	1 1/2	48.6	±0.5mm	±0.5mm	3.25		3.63
50	2	60.5	±0.5mm	±1%	3.65		5.12
65	2 1/2	76.3	±0.7mm	±1%	3.65		6.34
80	3	89.1	±0.8mm	±1%	4.05		8.49
90	3 1/2	101.6	±0.8mm	±1%	4.05		9.74
100	4	114.3	±0.8mm	±1%	4.50		12.2
125	5	139.8	±0.8mm	±1%	4.85		16.1
150	6	165.2	±0.8mm	±1%	4.85		19.2
175	7	190.7	±0.9mm	±1%	5.30		24.2
200	8	216.3	±1.0mm	±1%	5.85		30.4
225	9	241.8	±1.2mm	±1%	6.20		36.0
250	10	267.4	±1.3mm	±1%	6.40		41.2
300	12	318.5	±1.5mm	±1%	7.00		53.8
350	14	355.6	-	±1%	7.60		65.2
400	16	406.4	-	±1%	7.90		77.6
450	18	457.2	-	±1%	7.90		87.5
500	20	508.0	-	±1%	7.90		97.4
550	22	558.8	-	±1%	7.90		10.7
600	24	609.6	-	±1%	7.90		11.7

비고 1. 호칭방법은 A및 B중의 어느 하나를 사용한다. A에 따를 경우에는 A, B에 따를 경우에는 B의 부호를 각각의 숫자의 뒤에 붙여서 구분한다.

2. 호칭 350A 이상의 관의 바깥지름 허용차는, 둘레길이 측정에 따를 수 있다. 이 경우의 허용차는 ±0.5%로 한다.

또한, 바깥지름의 측정에 둘레길이를 사용할 경으의 판전은, 둘레길이 실측치 또는 실측치의 환산지름중의 어느하나에 따라도 좋다. 어느쪽도 동일허용차 (±0.5%)를 적용한다. 다만, 지름 (D)와 둘레길이(l)의 상호환산은 다음식에 따라서 계산한다.

l = π ․ D

여기에서 π=3.1416으로 한다.

3. 손질한 부분의 국소적인 부분에 대하여는, 두께의 허용차가 위 표를 만족하고 있는것이 확인될 경우에는 위 표의 바깥지름의 허용차를 적용하지 않는다.

4. 무게의 수치는 1㎤의 강을 7.85g 으로 하고, 다음 식에 따라서 계산하여 KS A 3251-1에 따라 유효숫자 3째 자리에서 끝맺음 한다.

W = 0.02466t(D-t)

여기에서 W :관의 무게(Kg/m)   t :관의 두께(mm)   D :관의 바깥지름(mm)

5. 이 규격에서 사용하는 무게란 질량을 뜻한다.